문서번호	도시철도토목부-14407
결재일자	2018.12.12.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
정중규		최진규	12/12 정대현
협 조
	주무관			조태현

「지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사」

계측비 조정 실정보고 검토보고

2018. 12.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사」

계측비 조정 실정보고 검토보고

「9호선 3단계 919공구 건설공사」와 관련 계측비 조정에 대한 실정보고가 있어 이에 대한 검토 보고임

※관련문서: 수성제2018-753(‘18.12.10) 계측비 조정 실정보고

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

❍ 공사개요

- 총연장  1,560m

□ 본  선 : 1,230m(개착 96m, 터널 1,134m)

□ 정거장 : 330m(2개소)

❍ 공 사 비 : 211,191백만원

❍ 공사기간 : '09.12.31~'18.12.31

❍ 시 공 사  : 삼성물산(주) 대표이사 최치훈 외 2개사

❍ 감 리 단 : ㈜수성엔지니어링 외 4개사

Ⅱ		관련근거

❍ 9호선 3단계 건설사업 공사기간 조정 검토보고 : 도시철도토목부-16559(’15.12.28)

- 사업기간 변경 : 당초 ’15년 → 변경 ’16년 (1년 연장)

❍ 9호선 3단계 기본계획 변경 알림 : 도시철도토목부-14391(’16.11.18)

- 사업기간 변경 : 당초 ’15년 → 변경 ’18년 (3년 연장)

Ⅲ		감리단 보고내용

❍ 계측 시행

구분	`10	`11	`12	`13			`14			`15			`16			`17			`18
931S1 환기구
		`11.03월~`18.02월
932정거장
		`11.02월~`18.04월
터널구간
				`12.12월~`18.04월
933정거장
		`11.02월~`18.04월

❍ 계측 적용 기간

구분	당초	변경	증․감
계측기간	36개월 (~’15.12.29)	63개월 (~’18.03.31)	증 27개월

******************

********

**************************************************************************************************************

Ⅳ		책임감리원 검토의견

❍ 지하철9호선 3단계 사업기간 연장에 따른 추가기간에 시행한 계측비에 대한 설계변경 및 계약금액 조정은 적정함.

Ⅴ		처리의견

❍ 상기 내용과 같이 서울지하철9호선 3단계 사업기간 변경으로 연장된 기간에 시행된 계측비 비용 반영은 적정하여 설계변경 및 계약금액 조정 처리코자 함.*****************

따로붙임 : 관련문서 1부.  끝.