문서번호	기전과-6074
보존기간	년
결재일자	2018.12.12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	12/12 박기범
협 조
	주무관			김현태

도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

설계변경 검토보고(2차)

2018. 12

남부도로사업소

(기  전  과)

도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

설계변경 검토보고(2차)

2018년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)와 관련하여, 공사과정에 발생한 시공물량 증․감에 따른 설계변경을 아래와 같이 검토 보고드림.

□ 관련근거

❍ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령

- 제74조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

❍ 2차 설계변경내역서 제출 요청건

- 솔로스-18-12-01, 2018.12.12.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 2018년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

❍ 계 약 자 :****************

❍ 공사기간 : 2018. 2. 28 ~ 2018. 12. 28

❍ 계약금액 : *************

□ 추진경위

❍ 2018. 4. 4.  1차 작업지시 (터널, 지하차도 세척)

❍ 2018. 4.27.  2차 작업지시 (고가 하부 LED 투광등 교체 등)

❍ 2018. 5.16.  3차 작업지시 (여의상류 IC 터널등 교체)

❍ 2018. 6.21.  1차 설계변경 시행(금액 변경 없음)

❍ 2018.  7. 3.  1차 기성 지급 **************

❍ 2018.  9. 3.  4차 작업지시 (여의상류 IC 외 2개소 배전반 교체)

❍ 2018.10. 1.  5차 작업지시 (노후 하부등 LED로 교체 등)

❍ 2018.10.11.  6차 작업지시 (가로등 교체 7본  등)

❍ 2018.11.  7.  7차 작업지시 (소화기 표시등 교체 62개 등)

❍ 2018.12.12.  설계변경 요청 공문 접수(2차)

□ 주요 설계변경 사항

❍ 제4,5,6,7차 작업완료에 따른 신규공종 발생 및 시공물량 내역조정

- 신규공종 주요내역

공 종	규 격	단위	수량	비고
난곡터널외 2개소 배전반 교체		개소	3
소화기 표시등 설치	LED	개	61
소화기 함 설치	호암2	개	15
소화기 표시등 전원케이블 설치	F-FR-8	M	1,228

- 물량조정 주요내역

공 종	규 격	단위	수량			비고
			당초	변경	증감
램프 및 안정기 교체		개	164	729	증565
전선관 배관	ST28	M	3	317	증314
투광등 철거	250~400W	등	15	74	증59
LED 투광등 설치	100W	등	10	57	증47

※ 물량변경 세부내역은 설계변경 내역서 참조

❍ 공사완료에 따른 제경비 정산

구분	당초	변경	증감
산재보험료	4,329,082원	4,984,262원	증655,180원
고용보험료	929,951원	1,070,693원	증140,742원
건강보험료	1,911,634원	-	감1,911,634원
연금보험료	2,799,981원	-	감2,799,981원
노인장기요양보험료	125,212원	-	감125,212원
산업안전보건관리비	2,364,558원	372,000원	감1,992,558원

❍ 설계변경 금액                                       (단위 : 원)

구분	당초 계약금액	변경 계약금액	증, 감액	비고
도급비	***********	***********	********

- 예산과목 : 도로시설관리, 도로기전시설물 관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비

□ 검토의견

❍ 시공사로부터 설계변경 요청 사항을 검토한 결과,

- 제4~7차 작업 완료보고 내역서상 신규공종 및 작업물량 적용내용이 현장과 동일하고,

- 제경비 정산내역 중 산재․고용보험 가입 완납증명서를 제출하였으며, 안전관리비는 사용 정산내역이 적정함.

- 또한, 제경비 검증결과 적정하므로 설계변경 시행코자 함.

□ 향후계획

❍ 2018. 12.     : 설계변경 시행(기전과→관리단속과)

❍ 2018. 12.     : 준공

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.