문서번호	교량안전과-21766
결재일자	2018.12.12.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
이회진		이홍재	12/12 김종호
협조

- 2018년 보라매고가 보수공사 -

설계변경 자문회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

안전총괄본부

(교량안전과)

- 2018년 보라매고가 보수공사 -

설계변경 자문회의 결과 보고

2018년 보라매고가 보수공사 설계변경 자문회의 결과 보고 임

Ⅰ		근 거

□『2018년 보라매고가 보수공사』설계변경 자문회의 개최 계획 보고

(교량안전과-21727, ‘18.12.11)

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 2018년 보라매고가 보수공사

□ 공사기간 : 2018. 5. 18. ~ 2019. 1. 10

□ 사 업 비 : ***********(배정액)

□ 공 사 비 : ***********

○ *******************************************

□ 공사내용

○ 교면방수 및 포장 33.46a, 아스팔트균열보수 4,240m,

○ 콘크리트 단면보수 156㎡, 강재도장 2,840㎡ 등

□ 계약상대자 : 새빛에이앤씨㈜외 1

Ⅲ		설계변경 자문회의 결과

□ 자문회의 개요

○ 일 시 : 2018.12.11.(화) 14:00

○ 장 소 : 교량안전과 회의실

○ 위원구성

- 위원장 : ***********************

- 위  원

· 내부(3) : **********************

· 외부(1) : ************************

- 간 사 : ***********

□ 자문결과 : 조건부 가결

□ 주요 자문내용

○ 재경비 정산 : 적정

- 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료 미정산 사유서 제출

- 건설기계대여금 직불 합의서 제출

※ 하도급직불합의서는 설계변경에 따른 하도급 변경계약시 직불합의서 변경 제출

○ 신규비목 단가산출 : 적정

- 당해 공사에 적용된 신규비목(계약상대자의 책임 없는 사유 포함)은

계약상대자가 설계변경 당시 산정한 단가에 낙찰률(86.645%)를               적용키로 검토 보고 하였으므로 이견 없음

○ 교통정리원 투입인원, 고소작업차 사용시간 등 근거자료 보완

○ 자문결과 공사비 변경 내역

구 분	실정보고 내역	자문결과 반영내역	증·감	비 고
총공사비	1,423,038,000	1,423,038,000	-
도 급 비	1,330,762,000	1,330,762,000	-
관 급 비	67,900,000	67,900,000	-
이 전 비 (폐기물처리 등)	24,376,000	24,376,000	-

Ⅳ		조 치 계 획

□ 자문회의 결과 통보(사공사, 감리) 및 설계변경 추진

Ⅴ		향 후 계 획

□ ‘18. 12. 14  : 설계변경 및 변경계약

□ ‘18. 12. 31  : 공사 준공

붙임  1. 설계변경 자문회의 결과 1부.

2. 설계변경 제비율 검증 확인 1부.

3. 설계변경 자문회의 계약금액 조정 관리대장 1부.

4. 설계변경 자문회의 결과 반영 내역서 1부. 끝.