문서번호	도시철도토목부-14409
결재일자	2018.12.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
조태현		최진규	12/12 정대현
협 조
	주무관			정중규

「지하철 919공구 건설공사 」

교통신호기 설치 관련 현장 실정보고 검토

2018. 12.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『지하철 919공구 건설공사』

교통신호기 설치 관련 현장 실정보고 검토

『서울지하철 9호선 3단계 건설공사』추진 중 책임건설사업관리기술자로부터 교통신호기 설치 관련 현장 실정보고가 있어 아래와 같이 검토함.

- 관련근거 : 교통신호기 설치 반영 실정보고【수성(919) 2018-755호(`18.12.10.)】

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

❍ 위     치 : 서울특별시 송파구 삼전동 ~ 송파구 석촌동

❍ 규     모 : 총 연장 1,560m

〔본선개착 96m, 터널 1,128m, 정거장(2개소) 336m〕

❍ 계약금액 및 공사기간

구 분	계약 금액(원)	공사 기간	비고
총체	211,191,000,000	2009.12.31. ~ 2018.12.31.
11차(금회)	18,921,000,000	2018.02.09. ~ 2018.12.31.

Ⅱ		추 진 경 위

❍ `09.12.31. : 공사 착공

❍ `10.08.25. : 교통신호기 원인자 공사 승인 요청(시공사→동부도로사업소)

❍ `11.06.15. : 실시설계 완료

신호등(12개소) 및 신호등 제어기(2개소) 이설 : 42,200,000원

❍ `14.10.30. : 교통신호지주 개선 검토보고(교통운영과)

지주 재질 변경〔배관용 강관 → 구조용 강관+분체도장(기와진회색)〕등

❍ `18.01.17. : 교통신호기 가공케이블 지중화 요청(교통운영과)

교통신호기 원인자공사는 지중화 되도록 승인시 협약서 작성

❍ `18.08.10. : 최종 교통처리계획 통보(서울특별시지방경찰청)

❍ `18.10.15. : 교통신호기 원인자부담공사 승인 통보(동부도로사업소)

제어기 신설 : 3대

지주 신설(디자인) 19본

신호등 신설(LED) 36조

신호 케이블 신설(지중화) : 1,303m

Ⅲ		책임건설사업관리자 검토내용

❍ 실정보고 사유

- 교통신호기 원상복구 시 디자인지주 개선 요청

※ 관련규정 : 지하철9호선 3단계 일괄공사계약특수조건 제19조 제2항 제2호

교통신호지주 개선 검토보고(교통운영과-20354, ‘14.10.30)

❍ 교통신호기 변경 현황

구분		당초	변경		비고
			규격	수량
신호등	신설	이설비 1식	LED	36조
제어기	신설		표준형	3대
지주	신설		디자인지주 (구조용강관+분체도장)	19본
신호케이블	신설		지중화	1,303m

❍ 물량 및 공사비 변경 현황                          (단위 : 백만원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
직접공사비	1식	313
제경비		107
계	42	420	증 378

❍ 책임건설사업관리기술자 보고내용

- 건설공사 추진중 유관기관(동부도로사업소, 서울특별시 교통운영과) 협의에 따라 반영 한 교통신호기 적용 산출이 타당하다고 사료되며, 추후 설계변경시 조정된 계약 금액을 반영 하고자 함.

Ⅳ		검토의견(조치계획)

❍ 상기 책임건설사업관리기술자 보고내용과 같이 교통신호기 설치 비용 반영은 적정하여 향후 계약금액 변경 시 조정 처리코자 함.

(공사비 증액 378백만원)

붙임 : 실정보고 1부.  끝.