문서번호	토목부-21024
결재일자	2018.12.12.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
남덕희		명경출	12/12 김영수
협조

시설공사(2차1회) 설계변경 검토보고

(노들섬 특화공간 조성 토목공사)

2018. 12.

시설공사(2차1회) 설계변경 검토보고

(노들섬 특화공간 조성 토목공사)

본 공사 장기 2차 시행중 노들섬 동측 군사시설 철거협의 지연에 따라 본 공사 공정지연으로 계획공정 변경, 오수관로 처리방식변경에 따라 우리 부로 공사시행부서 변경되어 설계변경 시행하고자 검토보고 드림

1		공사개요

○ 위    치 : 서울시 용산구 이촌동 302-6일대 (노들섬)

○ 공사규모 : 옹벽보수공사 10,137m, 보도육교설치 B=3.5m

L=139m, 우수관 979m, 오수관 467m

○ 공사기간 : 전체 `17.11.15.~`19.4.27.(2차 `18.6.27.~`19.4.27.)

○ 도 급 액 : 전체 6,099백만원 (1차 3,463백만원)

○ 시 공 사 : 신성종합건설(주)외 2

○ 감 리 사 : ㈜유탑엔지니어링, ㈜아이티엠코퍼레이션

서측

동측

(조 감 도)

2		설계 및 공사기간 변경 내용

□ 공사기간 및 설계 변경

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증·감
공사기간	전체	`17.11.15~`19.4.27	`17.11.15~`19.4.27	-
	2차	`18.6.27~`19.4.27	`18.6.27~`19.4.27	-
계약금액	전체	6,099,643,320	6,099,643,320	-
	2차	3,463,955,000	3,463,955,000	내역변경

□ 실정보고 내용

○ 하단부 콘크리트포장 수량변경 검토보고 [토목부-13819(2018.8.7.)]

○ 계단부 옹벽 보수보강 검토보고 [토목부-13883(2018.8.8.)]

○ 우·오수 맨홀시공 변경 검토보고 [토목부-17915(2018.10.22.)]

○ 오수관로(가압관로) 설치 검토보고 [토목부-18333(2018.10.29.)]

○ 옹벽보수보강 수량 변경 검토보고 [토목부-19288(2018.11.13.)]

○ 한강대교 난간 설치 검토보고 [토목부-19340(2018.11.14.)]

□ 설계변경 사유

○ 시설공사 2차 시행중 노들섬 동측 군시설 철거협의 지연으로 보도육교 설치 지연, 동측부지 역L옹벽 및 가시설흙막이 설치 지연, 포장공사 지연으로 공정에 차질이 발생하여 일부 내역변경 시행

○ 오수관로(가압관로)공정 신규발생, 기타 우수공사 PC맨홀 변경, 옹벽보수보강 수량증가

□ 공사비 증·감

공 종	수량	단위	당 초	변 경	증·감	비고
가설공사	1	식	1,779,985	1,779,985	-
철거공사	1	식	23,185,100	23,185,100	-
토 공 사	1	식	182,718,281	182,718,281	-
우수공사	1	식	252,518,419	305,589,304	53,070,885
오수공사	1	식	41,485,550	473,120,771	431,635,221
급수공사	1	식	3,591,359	3,591,359	-
구조물공사	1	식	74,709,430	62,859,485	감11,849,945
가시설공사	1	식	23,850,047	23,850,047	-
보행육교	1	식	338,462,350	53,695,497	감284,766,853
옹벽보수보강공사	1	식	350,261,532	401,059,695	50,798,163
토공 및 지정공사	1	식	14,583	14,583	-
철근콘크리트공사	1	식	4,478,826	4,478,826	-
돌공사	1	식	22,319,865	22,319,865	-
14. 금속공사	1	식	40,858,811	40,858,811
15. 미장공사	1	식	4,454	4,454
16. 계측공사	1	식	9,013,040	9,013,040
17. 기타공사	1	식	7,535,288	7,535,288
18. 작업부산물	1	식	-55,346	-55,346
19. 운반비	1	식	3,208,497	3,208,497
20. 사급자재	1	식	10,093,497	10,093,497
21. 예장동 지반침하복구공사	1	식	-	-
22. 부계약자공종	1	식	917,516,110	688,474,295	감229,041,815
직접공사비 계			2,307,549,750	2,317,395,407	9,845,656
제경비			614,374,117	610,659,622	감3,714,495
스마트 송장			1,111,800	1,111,800	감6,131,160
공급가액			3,149,050,000	3149050000
부 가 세			314,905,000	314,905,000
도 급 액			3,463,955,000	3,463,955,000

○2차(1회)                                             (단위 : 원)

3		조치계획

○ 본 공사(장기2차) 시행중 노들섬 동측 군시설 철거협의지연으로 공정상 차질이 발생하여 보행육교 및 포장공사를 내역반영에서 제외(2019년 설계내역반영)하고 금차 실정보고 내용을 반영한 설계내역으로 적정한 예산집행을 위하여 설계변경시행하고자 함

붙 임 : 변경계약서 1부.  끝