문서번호	도로보수과-11473
결재일자	2018.12.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
임동운		강종훈	12/12 이학구
협조
	주무관		이상하

2018년 도로굴착복구 노면표시 설치공사 외 2건(서부)  설계변경(최종)시행 계획 보고

2018. 12.  .

서부도로사업소

도로보수과

2018년 도로굴착복구 노면표시 설치공사 외 2건(서부)

설계변경(최종) 시행 계획 보고

우리 사업소에서 시행하는 ‘2018년 도로굴착복구공사 외 2건 노면표시 설치공사(서부)’ 등에 대하여 정비물량 증ㆍ감발생으로 설계변경(최종)을 시행하여 건설사업관리용역, 설계용역의 최종 사업비 집행 및 준공에 만전을 기하고자 함.

□ 관련 근거

◦ 도로보수과-11287(2018.12.7.)호 [2018년 도로굴착복구공사 외           2건 노면표시 설치공사 설계변경 제출]

□ 공사 개요

가. 공사명 : 2018년 도로굴착복구공사 외 2건 노면표시 설치공사(서부)

◦ 계약업체 : 원색건설(주)  대표  김기태

◦ 공사기간 : 2018.04.06. ~ 2018.12.31

◦ 공사규모 : 노면표시 도색(127km), 도로표지병설치(20개소)

◦ 계약금액 : 금 일억팔천사백삼십이만오백칠십원정(\184,320,570)

◦ 감독기관 : 노면표시 건설사업관리용역(주식회사 트래픽스)

나. 용역명 : 2018년 도로굴착복구공사 외 2건 노면표시 건설사업관리용역(서부)

◦ 계약업체 : ㈜트래픽스  대표  김희수

◦ 용역기간 : 2018.03.27. ~ 2018.12.31

◦ 용역내용 : 노면표시 설치공사 감리

◦ 계약금액 : 금 사백오십육만원정(\4,560,000)

다. 용역명 : 2018년 도로굴착복구공사 외 2건 노면표시 설계용역(서부)

◦ 계약업체 : ㈜제일엔지니어링   대표  최태희

◦ 용역기간 : 2018.03.27. ~ 2018.12.31

◦ 용역내용 : 노면표시 도면설계(36장)

◦ 계약금액 : 금 칠백사십팔만원정(\7,480,000)

□ 완료(변경) 내용

◦ 본 공사는 향후 굴착복구 신청 등 가상 물량으로 발주하였으며, 아

래와 같이 최종 물량이 확인되어 최종 정산처리하고자 함

공 종	규격	단위	당 초	변 경	증·감	비고
백색실선 및 파선	15cm	m	15,328	17,344	증) 2,016
황색실선 및 파선	15cm	m	16,512	15,452	감) 1,060
청색실선 및 파선	15cm	m	2,768	2,764	감) 4
분홍색실선 및 파선	15cm	m	1,086	976	감) 110
문자기호(백색)	15cm	m	14,353	15,884	증) 1,531
횡단보도(백색)	15cm	m	12,210	15,276	증) 3,066
차로밑그림(백색)		m	64,948	66,608	증) 1,660
합 계			127,205	134,304	증) 7,099

가. 물량 증·감 내역

◦ 노면표시공사 설계도면 수량감소 : 당초(36장), 변경(30장)

나. 설계변경 금액

2018년 도로굴착복구공사 외 2건 노면표시 설치공사(서부)
구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
총공사비		251,555,360	262,790,750	증) 11,235,390
도급 비	공급가액	167,564,155	173,188,182	증) 5,624,027
	부가세	16,756,415	17,318,818	증) 562,403
	계	184,320,570	190,507,000	증) 6,186,430
관 급 비		67,234,790	72,283,750	증) 5,048,960

2. 2018년 도로굴착복구공사 외 2건 노면표시 건설사업관리용역(서부)
구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
총용역비		4,560,000	4,560,000	변경없음
도급 비	공급가액	4,113,637	4,113,637	변경없음
	부가세	411,363	411,363	변경없음
	손해배상공제료	35,000	35,000	변경없음
	계	4,560,000	4,560,000	변경없음

3. 2018년 도로굴착복구공사 외 2건 노면표시 설계용역(서부)
구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
총용역비		7,480,000	6,233,000	감) 1,247,000
도급 비	공급가액	6,753,790	5,628,158	감) 1,247,000
	부가세	675,379	562,816	감) 5,628,158
	손해배상보험료	50,831	42,026	감) 562,816
	계	7,480,000	6,233,000	감) 42,026

□ 조치계획

◦ 상기 보고내용과 같이 도로굴착복구공사 및 굴착시행도로정비공사,

도로함몰 예방사업 등에 대한 노면표시 관련 설계변경(최종)을 시행

코자 하며 증액분에 대하여는 본사업비를 사용하여 예산집행에 만전을

기하고자 함

◦ 예산과목

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사,            시설비(\271,658,750)

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속시설물, 도로함몰예

방사업, 시설비(\1,925,000)

붙임 1. 노면표시공사 설계변경내역서 1부.

2. 노면표시공사 합의각서       1부.

3. 설계변경 검토의견서         1부.

4. 설계변경사유서              1부.

5. 노면표시 건설사업관리용역 계약내역서 1부.

6. 노면표시 설계용역 설계변경내역서 1부.

7. 노면표시 설계용역 합의각서 1부.