문서번호	방재시설부-15892
결재일자	2018.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
이병환		조성만	12/12 이임섭
협 조
	주무관			송영배

「신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사」

`18년 임시비상저류계획 관련 수방비용 정산 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 -

`18년 임시비상저류계획 관련 수방비용 정산 보고

2018년 수방대비 임시 비상저류계획에 따라 추진한 수방준비(수방관리자, 유출수직구 배수로 설치, 터널내 장비 반출·입) 비용에 대한 보고임.

□ 관련근거

○ 방재시설부-9587(2018.7.24.) : 2018년 수방대비 임시비상저류계획

○ 수성신월 제18-675,679,680(2018.12.10.) : 수방관리자, 장비

반·출입, 유출수직구 배수로 정비 실정 보고

□ 사업개요

○ 위    치 : 양천구 가로공원로~ 신월동 ~ 목동유수지

○ 규    모

- 빗물저류배수시설(L=4.7㎞, 내경 D=5.5~10m), 수직구 6개소

- 목동1빗물펌프장(Q=840㎥/분) 및 안전행동체험관(홍보관) 등

○ 사업기간 : 2013. 05. ~ 2019. 6

○ 총사업비 : 1,390억원(기투자 1,142억, '19년 예산 현액 248억 )

□ 보고내용

[수방관리자 비용 관련 보고]

○ 공사장 자체 수방이 아닌 양천구 수방대책과 병행하는 특수성을        감안 유입수직구(저지1, 2, 고지) 투입 수방관리자에 한하여         관련 비용 지급

○ 수방관리자 현장배치 대상시설 : 유입수문(저지1, 2, 고지)

○ 근무기준

- 당초 : 1단계 이상 발령시 유입수문 근무자 현장배치(`18.9.5이전)

- 변경 : 8.28 기습폭우 이후 수문근무자 투입 강화 계획에 따라          보강단계부터 유입수문 근무자 현장배치(`18.9.6이후)

○ 단가

- 시간당 단가(중급기술자(198,567/8시간 = 24,820원/hr)) 적용

○ 비상발령 및 근무 상황

연번	상황발생일시	근무시간대	근무시간	비상단계
1	07.01 10:00 ~ 07.02 06:20	10:00 ~ 06:20	20.3	호우주의보(1단계)
2	08.23 09:00 ~ 08.24 10:00	18:00 ~ 07:00	13.0	호우주의보(1단계)
3	08.28 19:40 ~ 08.28 23:30	19:40 ~ 23:30	3.8	호우경보(2단계)
	08.28 23:30 ~ 08.29 06:00	23:30 ~ 06:00	6.5	호우주의보(1단계)
4	08.29 14:00 ~ 08.29 18:40	18:00 ~ 18:40	0.7	호우주의보(1단계)
	08.29 18:40 ~ 08.30 05:00	18:40 ~ 05:00	10.3	호우경보(2단계)
5	09.06 18:00 ~ 09.07 08:00	18:00 ~ 08:00	14.0	호우대비(보강)
6	09.20 22:00 ~ 09.21 09:00	22:00 ~ 09:00	11.0	호우대비(보강)
7	10.05 14:00 ~ 10.05 22:00	14:00 ~ 22:00	8.0	호우대비(보강)
	10.05 22:00 ~ 10.06 11:00	22:00 ~ 11:00	13.0	호우주의보(1단계)
	10.06 11:00 ~ 10.06 13:00	11:00 ~ 13:00	2.0	호우대비(보강)

○ 소요예산 : 15백만원(별첨 내역서 참조)

[수방대비 장비 반·출입 비용 관련 보고]

○ 수방기간 비상저류를 위한 터널내 장비 반출·입 비용 반영(1회)

구분		저류배수터널			비고
		장비 반출		장비 반입
		1차(6/30)	2차(7/1)	10/14
B/H	1대(0.3w)			1대
	1대(0.7w)	1대	1대	1대
	1대(0.8w)			1대
M/T	8대(6m3)	4대	4대	7대
펌프카	1대(32m)	1대
포터블	1대(120m3/h)		1대
몰 리	1대(120m3/h)		1대	2대
렌 탈				1대
합 계		6대	7대	13대

○ 소요예산 : 32백만원(별첨 내역서 참조)

[유출수직구 임시 배수로 설치 비용 관련 보고]

○ 수방기간 비상 저류시 저류용량을 초과하여 월류하는 빗물을            유수지내로 유입하기 위한 배수로 설치 및 잔류수 임시배관            설치를 위한 유수지 상부 슬라브 깨기(복구) 비용 반영

- 유출수직구 임시 배수로 설치

- 잔류수 임시배관 설치를 위한 슬라브 깨기

상부 슬라브 깨기 및 복구

○ 소요예산 : 10백만원(별첨 내역서 참조)

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 임시 비상저류를 위한 사항으로 관련 규정(입찰안내서, 지방자체        단체 입찰 및 계약 집행기준)에 의거 발주처 지시에 의한 추가         공사로 인한 계약금액 변경은 적정한 것으로 사료됨.

□ 조치계획

○ 건설사업관리단 검토의견과 같이 수방대비 추가공사 부분에            대하여 승인하고 설계변경시 반영코자함.

붙임 : 건설사업관리단 관련 공문 3부.  끝.