문서번호	시설과-11660
결재일자	2018.12.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설과장	시설안전부장
문정주		송병욱	전결 12/13 이규상
협조

「수유6배수지 건설공사」

안전관리계획서 작성비 반영 검토 보고

2018.  12.

상수도사업본부

(시설안전부)

「수유6배수지 건설공사」

안전관리계획서 작성비 반영 검토 보고

수유6배수지 건설공사 설계 시 안전관리계획서 작성비용이 누락되어 추가 반영에 대한 검토 결과를 보고 드림.

사업개요

❍ 규    모 : 배수지 확충 3,100㎥(기존 3,000 ㎥ ⇒ 6,100㎥)
송배수관부설 500~600㎜, 연장 990m

❍ 기    간 : ’17. 12. 13.~’20. 5. 30.

❍ 도 급 비 : 2,667백만 원

❍ 시 공 사 : 영동건설㈜ 외 1개사

❍ CM 사 : ㈜한국종합기술 외 1개사

보고내용(건설사업관리자)

❍ 관련공문 : 낙산및수유6배수(감리) 제18-410호(’18. 12. 12.)

- 안전관리계획서 작성비 비용 반영 실정보고 제출

❍ 본 공사는 ‘시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법’에서 정한 1종 시설물 건설공사로 ‘안전관리계획서’ 수립대상이나, 설계 시  이에 대한 작성비가 누락되어 반영 필요

- 설계사에 안전관리계획서 작성비 반영 여부 확인결과 미반영 확인

※ 공사비 증·감 현황(증 3,850천원)

(단위:원)

공종명	규격	단위	당 초		변경		증·감 (변경-당초)
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
합계						3,850,000		3,850,000
안전관리계획서 작 성 비 용		식			1	3,500,000	1	3,500,000
부가가치세						350,000		350,000

검토의견(공사관리관)

❍ 본 공사는 관련규정에 따라 ‘안전관리계획’ 수립대상이며 안전관리비에는 작성비를 반영하도록 규정

	< 관련규정 >
① 건설기술진흥법 제98조 <안전관리계획의 수립> ․「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조제1호 및 제2호에 따른 1종시설물 및 2종시설물의 건설공사 ※ 1종시설물 : 1일 공급능력 3만톤 이상의 지방상수도로 배수지 포함 ② 건설기술진흥법 시행규칙 제60조 <안전관리비> ․ 안전관리계획의 작성 비용 포함

❍ 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 공사계약 일반조건 제6절의 공사 설계 변경 사항에 해당

❍ 금회 건설사업관리자 실정보고를 승인하고 설계변경 등 후속 절차 이행

붙임 : 건설사업관리자 실정보고 공문 1부.  끝.