문서번호	기전과-11005
결재일자	2018.12.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		12/13 송장현
협조
	주무관		정경성

『교통안전시설 원인자부담공사(목동초등학교 주변 통학로)』

현장 실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

강서도로사업소

(기전과)

『교통안전시설 원인자부담공사(목동초등학교 주변 통학로)』

현장 실정보고에 대한 검토보고

우리사업소에서 승인한 교통안전시설(신호) 원인자부담공사와 관련감리사로부터 현장 실정보고서가 제출되었기에 검토보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

서울경찰청 교통관리과-7511(2018.3.29.)호 및 –19852(2018.8.10.)호

양천구청 도로과-14946(2018.12.12.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 목동초등학교 주변 통학로 교통신호기 개량공사

원 인 자 : 양천구청

공사장소 : 목동동로12길(목동쉐르빌교차로~목동초등학교 앞)

공사내용 : 교통신호기(차/보) 신설 및 이설

공사기간 : 2018.09.11. ~ 2018.12.29.

공사관련업체

- 원인자 : 양천구청

- 감리사 : ㈜대성유비텍

- 시공사 : 태우산전

Ⅲ		실정보고 내용

현장여건에 따른 물량 및 공사금액 변경

Ⅳ		변동사유 및 내용

변동사유 및 상세내용

- 신호지주 및 신호등 관급자재에서 사급자재로 변경으로 인한 물량변경

- 도로사업소 연계공사구간으로 인한 물량변경

- 물량변경으로 인한 공사금액 변경

주요 변동 내용(물량)

※ 상세 변동내역 붙임 참조

Ⅴ		진 행 경 과

날 짜	내 용	시행자	비 고
‘18. 08. 17.	원인자공사 승인요청	양천구청
‘18. 09. 11.	원인자공사 승인통보	기전과	조건부 승인
‘18. 12. 12.	실정보고 승인요청	감리사

Ⅵ		검 토 결 과

현장 실정보고대로 설계변경을 승인

Ⅶ		행 정 사 항

실정보고 승인요청에 대한 승인 및 유관기관 통보

붙임 1. 실정보고 승인요청 1부.

2. 기술검토의견서(감리사) 1부.

3. 설계변경내역서 및 설계도면(변경전후) 각 1부.  끝.