문서번호	인력개발과-26777
결재일자	2018.12.13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		인재노무팀장	인력개발과장
윤진석		권소현	12/13 김기봉
협조

서천연수원

족구장 및 포장공사 (정산)설계변경 보고

2018. 12.

행 정 국

(인력개발과)

서천연수원 족구장 및 포장공사 (정산)설계변경 보고

「서천연수원 족구장 및 포장공사」와 관련, 현장여건 등에 따른 설계변경 및 보험료 사후 정산 등에 대한 정산 설계변경을 보고 드림

□ 관련근거

○ 서천연수원 족구장 및 포장공사 (정산)설계변경 제출[온주2018-12-12 (’18.12.12)]

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서천연수원 족구장 및 포장공사

○ 공사내용 : 족구장 15m×6m(부지:20.5m×27m), 제2주차장 및 소방도로 포장 1식

○ ******************

○ 공사기간 : ’18.10.15 ∼ ’18.12.14

○*******************

□ 정산 설계변경 : *******************************************

**********************

① 현장여건상 제2주차장 침하부위 및 하부지반 씽크홀 발생에 따라 철거부위 확대 및 재포장에 따라 물량 추가**************

② 해안가 진입도로의 원활한 차량진입을 위해 확장 추가**************

③ 맨홀설치구간 침하방지를 위하여 콘크리트 포장 추가************

④ 측량결과 족구장 부지 확보를 위해 옹벽쪽 이동에 따라 나무이식 추가**************

⑤ 도로용페인트 및 차선도색 추가: 발주청 요구에 따라 제2추자장 전체 추가 물량 반영**************

⑥ 절개지 사면 유실방지를 위하여 코아네트 추가 설치************

⑦ 기존 경계석 이동 재설치 물량 추가************

⑧ 현장여건에 따른 물량감소(인조잔디,U형측구)**************

**********************

‣ 사후정산 보험료 등에 대하여 미집행 금액 감 정산

*********************************************************,

***************************************, *****************

***********************

‣ 간접노무비, 산재및고용보험료, 기타경비, 일반관리비, 이윤, 부가세

○  (변경)계약금액

구 분	변 경 전	변 경 후	증감액	비 고
공급가액	**********	***********	**********
부가가치세	*********	**********	*********
도 급 액	**********	***********	************	단수조정

□ 예산현황

(단위: 원)

예 산	배정액	원인행위액	품의 가능액
630,000,000	630,000,000	604,215,450	25,784,550

※ 예산과목 : (조직)행정국 인력개발과, (정책)인적자원 역량강화, (단위)수련원 관리사업 (세부)연수원운영, (편성목)시설비및부대비, (통계목)시설비

□ 처리의견

○  변경금액은 연수원운영 사업비 중 시설비 품의가능액(낙찰차액) 사용

○  정산 설계변경 내용이 적정하므로 계약변경 의뢰(재무과) 조치

붙임 : 정산 설계변경 1건(시공사).  끝.