문서번호	도로보수과-11457
결재일자	2018.12.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
김경욱		유태용	12/13 김용제
협조

2018년 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사 설계변경(정산) 검토보고

2018. 12.

강서도로사업소

도로보수과

설계변경[정산] 검토보고

공사시행 중 발생한 물량 증·감 및 신규 공종 추가·변경에 따른 설계변경(정산) 검토보고임.

공사개요

○ 공 사 명 : 2018년 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2018. 03. 13. ~ 2018. 12. 15.

○ 공사개요 : 과속방지턱 도색, 도로표지병 설치, 가드레일 정비, 시설물세척

시선유도봉 설치, 무단횡단금지시설 철거 및 설치 등

○ 도 급 액 : 269,043,410원

○ 도 급 자 : 이에스피건설 강 상 수

변경사항 및 사유

변경사항	변경사유	비고
① 신규공종 추가	·계약된 공종 외 민원사항 대응	·중앙차로 배수로 준설 등
② 기존공종 물량증감	·실 시공물량 반영	·1~6차 작업완료 물량
③ 공사기간 연장	·민원발생에 따른 추가공사 진행	·시선유도봉, 무단횡단금지시설 정비 등

주요 변경 내역(안)

① 신규공종 추가

연번	공 종	규 격	단위	변경전	변경후	증	감
1	측구설치	B=50	m	0	19	19	-
2	무단횡단금지시설 가로봉 자재	L=2m	개	0	89	89	-
3	장애물식별표지 설치	-	개	0	10	10	-
4	무단횡단금지시설 철거	포장부속작업, 야간	경간	0	291	291	-
5	무단횡단금지시설 설치	포장부속작업, 야간	경간	0	291	291	-
6	무단횡단금지시설 기초제거	포장부속작업, 야간	개	0	563	563	-
7	장애인 점자블럭 포장	-	장	0	4	4	-
8	강성방호울타리 이설	L=2m	일	0	2	2	-
9	전지 작업	-	주	0	60	60	-
10	충격흡수시설 이설	CC4	개	0	1	1	-

※신규공종에 대하여 낙찰율(87.75%) 적용

② 기존공종 물량증감

연번	공 종	규 격	단위	변경전	변경후	증	감
1	노측용 방호울타리 철거	개방형, 성토부	경간	20	50	30	-
2	중분대용 방호울타리 철거	개방형, 포장부	경간	20	0	-	20
3	건식그루빙 설치	종절단, 9*51*4	㎡	500	0	-	500
4	콘크리트 단면보수 EG프로텍터	t=10mm,벽체	㎡	130	58.8	-	71.2
5	콘크리트 열화단면제거	기계(착암기),10mm	㎡	30	0	-	30
6	콘크리트 균열보수(건식)	B=0.3㎜, t=100㎜	m	40	0	-	40
7	시선유도봉 설치	200X80X750	개	1,000	2,315	1,315	-
8	무단횡단금지시설 설치[자재비 제외]	사업소 비축자재	경간	60	105	45	-
9	무단횡단금지시설 기초제거	포장부속작업, 주간	개	40	236	196	-

③ 공사기간 연장

변경 전	변경 후	공사기간 증·감
2018. 03. 14. ~ 2018. 12. 15.	2018. 03. 14. ~ 2018. 12. 21.	증) 6일

설계 변경 내역(안)

○ 설계 변경 내역

(단위 : 원)

구 분		금 액		증·감
		당 초	변 경
총 공 사 비		447,489,410	514,291,710	증) 66,802,300
도급비	공 급 가 액	244,584,919	314,848,328	증) 70,263,409
	부가가치세	24,458,491	31,484,832	증) 7,026,341
	계	269,043,410	346,333,160	증) 77,289,750
관 급 자 재 비		178,446,000	167,958,550	감) 10,487,450

※도급비 증액분(77,289,750원)은 낙찰차액, 잔여관급비 등 활용하여 정산

○ 도급비 증액 내역

(단위 : 원)

도급비 반영 예산		금액	비고
예산 내역	예산 과목
낙찰차액	·도로부속시설물 일상유지관리	38,516,590
잔여 관급비	·도로부속시설물 일상유지관리	10,170,570
무단횡단금지시설 정비예산	·교통사망사고 줄이기 사업 ·화곡로 무단횡단금지시설 설치	17,624,590	·무단횡단금지시설 정비
자전거도로 정비예산	·자전거 도로 안전시설 확충	10,978,000	·시선유도봉 설치 등
합 계		77,289,750

조치의견

○ 상기와 같이 물량변경 및 공사기간 등의 변경사항을 반영하여 설계변경(정산)을 시행하고자 함.

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 검증확인서 1부. 끝.