투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	2018년 도로굴착복구공사 외 2건 노면표시 설치공사 설계 변경(최종) 시행

1. 도로보수과-11473호(2018.12.12.)와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행하는 ‘2018년 도로굴착복구공사 외 2건 노면표시 설치공사(서부)’에 대하여 아래와 같이 설계변경(최종) 시행하여 변경계약 및 준공에 만전을 기하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2018년 도로굴착복구공사 외 2건 노면표시 설치공사(서부)

나. 공사기간 : 2018.04.06. ∼ 2018.12.31.

다. 계약업체 : ***************

라. 설계변경금액

(단위 : 원)

구 분	설계변경금액		증ㆍ감	비 고
	당 초	변 경
총공사비	***********	***********	*************
도급비	***********	***********	*************
관급비	**********	**********	*************

마. 설계변경 사유 : 도로굴착복구공사 및 굴착시행도로 정비공사, 도로함몰예방                  사업의 공사구간 노면표시 물량증ㆍ감 등 발생

바. 예산과목

- 안전총괄본부도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사,시설비 및 부대비, 시설비(금260,865,750원)

- 안전총괄본부도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속시설물, 도로함몰예방사업, 시설비 및 부대비, 시설비(금1,925,000원)

붙임 : 1. 2018년 도로굴착복구 노면표시 설치공사 외 2건 (서부) 설계변경(최종) 시행 계획 보고 1부.

2. 2018년 도로굴착복구 노면표시 설치공사 외 2건(서부) 설계 변경 내역서 1부.

3. 설계변경사유서 1부.

4. 설계변경검토의견서 1부.

5. 설계변경 합의각서 1부.  끝.

	도로보수과장
주무관	임동운		주무관	이상하		도로보수과장	12/13 강종훈
협조자
시행	도로보수과-11490	(		)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203 서부도로사업소 3층 도로보수과(상암동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8352	/전송	02-300-8364	/	lduon@seoul.go.kr	/	부분공개(5)