투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	공사 중지 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 본부와 귀 사간 계약 체결(2007.12.28.) 후 지장가옥에 대한 보상 절차 이행으로 2017.1월부터 공사 중지한「신상도 지하차도 확장공사」의 총차 준공기한(2018.12.31.)이 도래함에 따라 장기계속계약을 유지하기 위하여 6차 공사를 계약하였으나,

3. 2018.12월 현재 지장가옥 주민 이주 독려 중으로 주민 이주 완료 후 공사 재개하고자 하오니 별도 공사 재개 요청시까지 공사 중지하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	유한회사 한백종합건설 대표 이진일 귀하,구민종합건설 주식회사 대표 양일우 귀하
주무관	이시연		방재시설과장	진재섭		방재시설부장	12/13 이임섭
협조자
시행	방재시설부-15970	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-2133-8441	/전송	02-2133-0740	/	siyeon0907@seoul.go.kr	/	대시민공개