＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	서부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(현행아리수올림터 개량 전기공사)

우리 사업소에서 시행중인 “현행아리수올림터 개량 전기공사”에  대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 현행아리수올림터 개량 전기공사

나. 계약상대자 : **************

다. 공사기간 : 2018. 10. 15. ~ 2018. 12. 13.

라. 변경내역

- 금액 변경                                                       (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증,감	비고
계	10,494,000	11,110,000	증 616,000
공급가액	9,540,000	10,100,000	증 560,000
부가세	954,000	1,010,000	증 56,000

- 설계변경 내역                                                  (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증,감	비고
계	10,494,000	11,110,000	증 616,000
전기공사	3,518,000	4,723,899	증 1,205,899	전력간선공사 및 동력설비공사
제어공사	1,018,000	697,413	감 320,587	제어설비공사
철거 및 임시장비설치공사	2,412,112	2,139,214	감 272,898	케이블철거 및 임시장비 설치공사
제경비 및 부가세	3,545,888	3,549,474	증 3,586

마. 설계변경사유 : 물량변경 및 제경비 실사용분 정산

바. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및  부대비(22105)

붙 임 : 1. 설계변경개최결과보고서 1부.

2. 설계변경심의결과서 1부.

3. 설계변경내역서 1부.

4. 제비율 검증 확인서 1부.

5. 고용,산재보험 완납증명원 1부.

6.  변경내역 합의서 1부.

7. 설계변경 시행문 1부.  끝.

	시설관리과장
★주무관	홍하나		기전팀장	이상연		시설관리과장	12/11 김홍준
협조자
시행	시설관리과-25340	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3721	/전송	3146-3739	/	skshana82@seoul.go.kr	/	부분공개(7)