투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설폐기물처리용역 준공기한 연기 의뢰

1.『중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설폐기물처리용역』과 관련하여 준공기한 연기(1차 2회)을 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설폐기물처리용역

나. 용역금액 : 총괄 221,612,000원, 1차 150,000,000원

다. 용역기간 :  총괄  2017. 10. 01 ∼ 2019. 11. 30

1차  2017. 10. 01 ~ 2018. 12. 31

라. 용역업체 : 정일산업(주) 대표 박상만

마. 변경사유 : 폐기물 발생 미도래로 인한 건설폐기물처리용역 기간연장 필요

바. 변경내역

(단위 ; 원)

구 분		당 초	변 경	증․감
용역 금액	총괄	221,612,900	221,612,900	-
	1차	150,000,000	150,000,000	-
용역 기간	총괄	2017.10.01 ∼ 2019.11.30	2017.10.01 ∼ 2019.11.30	-
	1차	2017.10.01 ∼ 2018.12.31	2017.10.01 ∼ 2019. 3.31	증 90일

아. 예산과목 : (공기업하수도사업특별회계) 물순환안전관, 물재생시설과, 자본적지출, 비가동설비자산취득, 건설중인자산, 시설비 및 부대비, 시설비, 물재생시설개선, 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치

붙임   1) 방침서 1부.

2) 합의각서 1부.  끝.

	방재시설부장
전문관	조양호		환경시설과장	장수철		방재시설부장	12/11 이임섭
협조자	경리과장	이현숙
시행	방재시설부-15789	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8784	/전송	02-3708-8756	/	cyh2466@seoul.go.kr	/	부분공개(5 6)