“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 계약변경 의뢰(2018 중앙버스전용차로 흐름개선 설계 용역)

우리시에서 추진한 ‘2018 중앙버스전용차로 흐름개선 설계’ 용역에 대하여 아래와 같이 변경 계약을 의뢰하오니 처리하여주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 2018년 중앙버스전용차로 흐름개선 설계 용역

나. 계약업체 : ************************

다. 계약기간 : 2018. 4. 2. ~ 2018. 12. 31.

라. 변경내용 : 계약금액 및 계약내역 변경(붙임 “설계변경내역서” 참조)

구분	용역비		증감	비고
	당초	변경
계	71,659,000원	72,400,000원	증) 741,000원

마. 변경사유 : 설계 지점 및 물량 변경

바. 예산과목 : (교통사업특별회계) 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 버스서비스 이용제고, 중앙버스전용차로 흐름개선, 시설비(401-01)

붙임  1. 설계 변경(정산) 보고 1부.

2. 설계 변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	교통운영과장
주무관	김재정		BRT팀장	代류근호		교통운영과장	12/11 강진동
협조자	주무관	류근호		계약2팀장	이태영
시행	교통운영과-21029	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-2474	/전송		/		/	부분공개(5)