“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	용역 계약변경 의뢰(정동 역사재생 활성화계획 수립 용역)

우리부서에서 시행중인‘정동 역사재생 활성화계획 수립 용역’에 대하여 다음과 같이 계약변경 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명: 정동 역사재생 활성화계획 수립 용역

나. 계 약 자: (주)미래이엔디, (주)인토엔지니어링도시건축사사무소

다. 변경내용

1) 계약금액: 351,710,000원 → 474,852,000원(증123,142,000원)

2) 준공기한 연기: 2018. 12. 30 → 2019. 6. 30(증 6개월)

라. 예산과목 : 도시재생기금, 도시재생 기반시설 조성, 정동 역사재생사업, 시설비(증123,142,000원)

붙  임 : 1. 방침서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 변경 과업내용서 1부.

4. 변경내역서 1부.

5. 합의각서 1부.  끝.

	역사도심재생과장
주무관	조중환		도심계획팀장	이승완		역사도심재생과장	12/11 代김용민
협조자	계약1팀장	조현
시행	역사도심재생과-14223	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가) 서울특별시청 본관 11층	/
전화	02-2133-8495	/전송	02-2133-0742	/	skkujo86@seoul.go.kr	/	부분공개(5)