투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰 및 공사 중지 알림(신상도 지하차도 확장공사)

1. 우리 본부 시행 건설공사인「신상도 지하차도 확장공사」총차 및 6차에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바라며, 지장가옥 주민 이주 완료 전까지 공사를 일시중지함을 붙임과 같이 알려드립니다.

가. 공 사 명 : 신상도 지하차도 확장공사

나. 도 급 비 : 총차 11,964,876,000원(6차 2,550,000,000원)

다. 공사기간 : 총차 '07.12.31.~'18.12.31.(6차 '18.12.15.~'18.12.31.)

라. 도 급 사 : (유)한백종합건설 외 1개사 (대표 : 이진일)

마. 준공기한 연기내역 (※ 계약금액 변경 없음)

구 분		당 초	변 경	비 고
공사기간	총차	'07.12.31.~'18.12.31.	'07.12.31.~'20.12.31.	증)731일
	6차	'18.12.15.~'18.12.31.	'18.12.15.~'19.12.31.	증)365일

바. 연기사유 : 지장가옥에 대한 보상절차 이행 및 주민 이주 독려에 장기간 소요되어 절대공기가 부족한 실정이며 지장가옥 주민 이주 완료시 공사 재개 가능함

붙임 : 1. 총차 준공기한 연기 보고 1부

2. 6차 준공기한 연기 및 공사중지 보고 1부

3. 준공기한 연기의뢰서 1부

4. 합의각서 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	이시연		방재시설과장	진재섭		방재시설부장	12/12 이임섭
협조자
시행	방재시설부-15959	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-2133-8441	/전송	02-2133-0740	/	siyeon0907@seoul.go.kr	/	대시민공개