＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경(2차) 및 차수별 부기금액 변경 시행에 따른 계약의뢰(긴급누수복구)

1. 우리 사업소에서 시행중인 “2018년 서초․강남구관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)"에 대하여 계약물량 증 ․ 감 사항 및 신규공종 변경사항이 발생함에 따라 아래와 같이 설계변경(2차) 및 차수별 부기금액 변경시행하고 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2018년 서초․강남구 관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)

나. 도 급 자 : ****************************

다. 계약기간 : 2018. 4. 26. ~ 2019. 6. 30.

라. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	비 고
총계약금액	1,826,810,760	1,826,810,760	변동없음

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	비 고
총부기금액	1,826,810,760	1,826,810,760	변동없음
1차 부기금액	1,400,000,000	1,122,693,000	감 277,307,000
2차 부기금액	426,810,760	704,117,760	증 277,307,000

마. 차수별 부기금액 변경

바. 설계변경 사유 : 신규공종 및 공종별 계약물량 증,감 발생, 차수별부기금액 변경

- 신 규 공 종 : 고압블록포장걷기인력 면적 10㎡미만, 누수야간,불용외 62종

- 계약물량 증가 : 아스팔트포장절단(100~150mm)누수,불용 외 129종

감소 : 아스팔트포장깨기(소형브레커,누수,불용)외 94종

- 사급자재 물량 변경 : 스테인리스티(15mm) 외 25종

사. 예산과목 - 상수도사업비,영업비용,배급수비,수선유지교체비,수선유지비(누수복구)

상수도사업비,영업비용,배급수비,수선유지교체비,수선유지비(불용관정비)

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비(노후밸브정비)

따로붙임 :  1. 설계변경 심의 의견서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	강희창		시설관리과장	12/12 편병률
협조자
시행	시설관리과-22981	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)459-4	/
전화	02-3146-4905	/전송	02-3146-4939	/	jin2ju@seoul.go.kr	/	부분공개(6)