“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	G밸리 개발계획 변경 및 실시계획 수립관련 영향평가(환경,교통)용역 계약기간 연장의뢰

우리 부서에서 시행 중인

‘ ① G밸리 개발계획 변경 및 실시계획 수립 관련 교통영향평가 용역

② G밸리 개발계획 변경 및 실시계획 수립 관련 쇼규모 환경영향평가 용역’ 의 과업기간을   다음과 같이 연장하고자하니 조치하여 주시기 바랍니다.

<서울디지털산업단지(G밸리) 개발계획 변경 및 실시계획 수립에 따른 교통영향평가 용역>

가. 용역개요

- 계약건명 : 서울디지털산업단지(G밸리) 개발계획 변경 및 실시계획 수립에 따른 교통영향평가 용역

- 계약업체 : 주엔지니어링(주)

- 계약금액 : 금150,626,530원(금일억오천육십이만육천오백삼십원)

나. 변경내용 : 과업기간 연장 (금액 변동없음)

- 당    초 : 2017.6.1. ~ 2018.12.28.

- 변    경 : 2017.6.1. ~ 2019.10.31. (307일 연장)

<서울디지털산업단지(G밸리) 개발계획 변경 및 실시계획 수립 관련 소규모 환경영향평가 용역>

가. 용역개요

- 계약건명 : 서울디지털산업단지(G밸리) 개발계획 변경 및 실시계획 수립관련 소규모 환경영향평가 용역

- 계약업체 : ㈜대영이이씨

- 계약금액 : 금113,074,000원(금일억일천삼백칠만사천원)

나. 변경내용 : 과업기간 연장 (금액 변동없음)

- 당    초 : 2017.9.26. ~ 2018.12.28.

- 변    경 : 2017.9.26. ~ 2019.10.31. (307일 연장)

※ 붙   임  :  1. 방침서(교통, 환경) 각 1부.

2. 합의각서(교통, 환경) 각 1부.   끝.

	거점성장추진단장
주무관	최소영		산업거점정책팀장	한정훈		산업거점활성화반장	12/12 김상춘
협조자
시행	거점성장추진단-1705	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개