문서번호	토목부-21094
결재일자	2018.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
황윤기		代김동현	12/12 김영수
협조

폐기물처리용역 설계변경 검토 보고

【천호대로 중앙버스전용차로】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

교량건설과

건설폐기물처리용역 설계변경 검토 보고

【천호대로 중앙버스전용차로 설치공사】

「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」에 의거 분리 발주하여 시행중인 천호대로 중앙버스전용차로 설치공사 건설폐기물 처리용역에 대하여 시설공사 준공에 맞춰 건설폐기물처리용역 준공기한을 연기하고 도급내역 조정 사항이 있어 검토 보고 드림

※ 관련근거 : 천호수 제2018-4032호(2018.12.12.)

용역 개요

❍ 용 역 명 : 천호대로 연장 중앙버스전용차로 설치공사 건설폐기물처리용역

❍ 용역규모 : 폐아스콘 2,261톤, 폐콘크리트 1,650톤

❍ 용역기간 : `17.11.07.~`18.12.20.

❍ 용역금액 : 211,840천원

❍ 계 약 자 : ㈜상우이디아이, ㈜씨.에스

용역비 및 용역기간 변경현황

구 분		용역비 및 용역기간			비고
		당 초	변 경	증·△감
용 역 비 (천원)	전체 5회 변경	211,840	211,840	-
용역기간 (일)		‘17.11.07∼‘18.12.20 (409)	‘17.11.07∼‘19.09.30 (693)	증 284

설계변경 현황

❍ 폐기물 수량 변경 현황

공 종	단위	수량 증·감			비 고
		당 초	변 경	증·△감
■ 폐기물 운반
야간 운반	㎥	2,477.00	2,110.56	△ 366.44
주간 운반	㎥	738.00	1,580.75	842.75
■ 폐기물 처리
폐콘크리트	ton	1,650.00	2521.18	871.18
폐아스콘	ton	2,261.00	816.11	△1,444.89
평삭아스콘(유용)	ton	3,607.00	5,294.51	1,687.51

❍ 용역비 증감 현황(총도급비 변경없음)

공 종	전 체			비 고
	당 초	변 경	증·△감
1.폐기물 운반비	102,105,508	111,670,477	9,564,969
제경비(일반관리비+이윤)	21,441,111	23,450,198	2,009,087	단수정리
2.폐기물 처리비	69,035,200	57,461,144	△11,574,056
공급가액	192,581,819	192,581,819	-
부 가 세	19,258,181	19,258,181	-
총용역비	211,840,000	211,840,000	-

❍ 준공기한 연기 사유

- 시설공사 준공기한 연기에 따른 중앙버스전용차로 설치공사 폐기물 처리용역 준공기한 연기

※ 공사 설계변경 검토 보고[토목부-21057(’18.12.12.)]

❍ 연기 귀책사유: 계약상대자 책임 없음

❍ 지체상금 부과: 미부과

❍ 설계변경 사유

- 천호대로 연장 중앙버스전용차로 소성변형으로 인한 건설폐기물의 수량 변경에 따라 최종처리량을 반영

천호대로 확장공사 폐기물처리용역(본공사)

❍ 별도 발주되어 추진중인 천호대로(광나루역)확장공사 폐기물처리용역 또한 시설공사 준공기한 연기에 따라 준공기한 연기 필요

❍ 준공기한 연기내용

구 분	계약기간			계약금액 (천원)			설계변경 사유	비고
	당초	변경	증·△감	당초	변경	증·△감
전체	‘10.12.31 ∼ ‘18.12.20	‘10.12.31 ∼ ‘19.09.30	증 284일	688,706	688,706	-	- 상징조형물 설치 및 광진구청 요청 추가시설 공사
6차	‘16.01.14 ∼ ‘18.12.20	‘16.01.14 ∼ ‘19.09.30	증 284일	220,290	220,290	-

❍ 연기 귀책사유: 계약상대자 책임 없음

❍ 지체상금 부과: 미부과

조치계획

❍ 위 보고 내용과 같이 도급내역 조정(도급비 변경없음) 및 준공기한 연기 의뢰하여 건설폐기물처리용역 변경 계약하고자 함.

붙임  관련문서 1부.  끝.