문서번호	버스정책과-33707
결재일자	2018.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정류소관리팀장	버스정책과장
이오수		이상학	12/12 오희선
협조

2018년 가로변정류소 이용환경 개선 토목공사 준공기한 연기

2018. 12

버스정책과

2018년 가로변정류소 이용환경 개선 토목공사 준공기한 연기

2018년 가로변정류소 이용환경 개선 토목공사에 대해 굴착인허가 소요 및 동절기 공사 중단에 따른 절대 공사기간이 부족하여 준공기한을 연기하고자 함.

1	계약 내역

□ 계약건명 : 2018년 가로변정류소 이용환경개선 토목공사

□ 계약금액 : 금341,397,130원

□ 계약업체 : 세안이앤씨(주) 대표 이은상

□ 계약기간 : 2018. 8. 30 ~ 2018. 12. 15

□ 공사내용 : 가로변 무장애정류소 총 22개소 설치

2	준공기한 연기사유

□ 연기사유

- 무장애정류소 22개소중 라운드경계석, 측구, 승차대 터파기 14개소를 완료하고 너머지 8개소는 토목공사 부분 미착공 상태임

- 하반기 5개구 8개소에 대한 굴착계획 심의 등 행정절차 추가 소요되고 동절기 공사중지로 인한 절대공기가 부족하여 연기

□ 연기기한 : 준공일자 2019. 6. 30 (복합공정 동일적용)

3	준공기한 연기내역

□ 준공기한 연기내역 : 당초】‘18.12.15⇒ 변경】‘19.06.30

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

4	후속 조치계획

〇 2018. 12월 : 해당공사, 용역 준공기한 재무과 연기의뢰

〇 2019. 06월말 : 공사 및 용역 개별 준공처리.

붙임 1. 2018년 가로변정류소 이용환경개선 토목공사 계약서 1부.

2. 토목공사 공정현황 및 합의각서 각 1부.   끝.