문서번호	도시철도토목부-14424
결재일자	2018.12.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
조규양		최진규	12/12 정대현
협 조
	시설전기과장			이덕한
	설비계획과장			이명수

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설사업관리용역』

계약금액조정 검토보고(총괄7회, 6차1회)

2018. 12.

도시철도토목부

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설사업관리용역』

계약금액조정 검토보고(총괄7회, 6차1회)

하남선(5호선 연장) 1-1공사 건설사업관리용역 감리원 투입계획 변경에 따른 계약금액조정(총괄7회, 6차1회) 검토 보고임.

1		용역개요

○ 용 역 명 : 하남선 1-1공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 기    간 : `15.03.13. ~ `19.04.10

○ 도 급 자 : (주)동일기술공사 외 5개사

○ 계약금액 : 3,934백만원

[단위 : 백만원]

구 분	총 괄	기준공(1~5차)	6차	잔 여
게약기간	`15.03.13 ~ `19.04.10	`15.03.13 ~`18.08.23	`18.08.24 ~ `19.04.10	-
계약금액	3,934	2,081	661	1,192

2		보고내용

○ 변경현황

[단위 : 백만원]

구 분	당 초		변 경		증 ․ 감
	계약기간	계약금액	계약기간	계약금액	계약기간	계약금액
총괄(7회)	’15.03.13~ ‘19.04.10	3,934	’15.03.13~ ‘19.04.10	3,954	-	증) 20
기준공	’15.03.13~ ‘18.08.23	2,081	’15.03.13~ ‘18.08.23	2,081	-	-
6차(1회)	’18.08.24~ ‘19.04.10	661	’18.08.24~ ‘19.04.10	679	-	증) 18
잔 여	-	1,192	-	1,194	-	증) 2

○ 변경사유

〔총괄(7회)〕

- 건설사업관리기술자 기간중 투입시기 변경(소방, 기계)

- 본선1구간 기존선 지장물 이설에 따른 건설사업관리기술자 투입기간 변경(전기)

※ 증 20백만원(1.854인·월)

분야별	투 입 기 간		사 유
	당 초	변 경
소 방	’19.05.01~ ‘20.12.31 (5개월)	’19.02.01~ ‘21.10.31 (5개월)	H1정거장 소방공사 공정추진을 감안 기간중 투입시기 조정
기 계	’19.08.01~ ‘20.12.31 (23.624개월)	’19.08.01~ ‘21.10.31 (23.624개월)	H1정거장 기계공사 공정추진을 감안 기간중 투입시기 조정
전 기	’18.05.14~ ‘18.08.23	’18.05.14~ ‘18.10.24	시점부 지장선로 이설 관련 기간중 투입등급(고급 ⇒ 고급, 중급) 및 투입기간 변경

〔6차(1회)〕

- 건설사업관리기술자 투입기간 변경(소방)

- 본선1구간 기존선 지장물 이설에 따른 건설사업관리기술자 투입기간 변경(전기)

분야별		투 입 기 간		사 유
		당 초	변 경
소방	6차	-	’19.02.01~ ‘19.04.10	H1정거장 소방공사 공정추진을 감안 기간중 투입시기 조정
	향후	’19.05.01~ ‘20.12.31	’19.04.11~ ‘21.10.31
전 기		’18.05.14~ ‘18.08.23	’18.05.14~ ‘18.10.24	시점부 지장선로 이설 관련 기간중 투입등급(고급 ⇒ 고급, 중급)및 투입기간 변경

○ 건설사업관리기술자 투입계획 변경현황

- 총  괄

[ 단위 : 인·월 ]

구 분		총 계	상주 감리원					비상주 감리원
			토 목	건 축	기 게	전 기	소 방
감 리 투입인원	당초	321.363	197.534	23.624	23.624	23.377	5.000	48.204
	변경	323.217 (증 1.854)	197.534	23.624	23.624	24.953 (증 1.576)	5.000	48.482 (증 0.278)

3		조치의견

○ 상기 보고와 같이 감리원 투입계획 변경 및 추가 투입에 따른 건설사업관리용역에 대한 계약금액조정(총괄7회, 6차1회)을 시행하고자 함.

- 총괄

· 준공기한 : 변경없음

· 용역금액 : (당초) 3,934백만원 ⇒ (변경) 3,954백만원 (증 20백만원)

- 6 차

· 준공기한 : 변경없음

· 용역금액 : (당초) 661백만원 ⇒ (변경) 679백만원 (증 18백만원)

붙  임 : 1. 건설사업관리단 공문 1부.

2. 감리원투입계획 1부. 끝.