문서번호	거점성장추진단-1648
결재일자	2018.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	산업거점정책팀장	산업거점활성화반장
최소영	한정훈	12/12 김상춘

- G밸리 개발계획(변경) 및 실시계획(지구단위계획 포함) 수립에 따른 -

소규모 환경영향평가 용역 준공기한 연기 보고

2018. 12.

경제진흥본부

(거점성장추진단)

- G밸리 개발계획(변경) 및 실시계획(지구단위계획 포함) 수립에 따른 -

소규모 환경영향평가 용역 준공기한 연기 보고

서울디지털산업단지(G밸리) 개발계획(변경) 및 실시계획(지구단위계획 포함) 수립 용역 계약 기간 연장에 따라, 관련 용역인 소규모 환경영향평가 용역준공기한을 연기하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : G밸리 개발계획변경 및 실시계획 수립 관련 소규모 환경영향평가 용역

○ 과업범위 : G밸리 1,925천㎡(1단지 451천㎡, 2단지 388천㎡, 3단지1,086천㎡)

○ 계약기간 : 2017.9.26.~ 2018.12.28.

※ 과업 완료일 : 산업단지 개발계획(변경) 및 실시계획인가를 위한 산업단지계획심의위원회 심의 및 지형도면고시 완료시

○ 계약금액 : 금113,074,000원(금일억일천삼백칠만사천원)

○ 계약업체 : 주식회사 대영이이씨 (대표 정준화)

○ 과업내용 : 서울디지털산업단지(G밸리) 지구단위계획 수립에 따라, 개발구역 및 주변지역의 환경현황조사, 입지 타당성 검토, 환경에 미칠 영향의 예측, 평가 및 대책 수립

□ 추진현황

○ ’17. 8.    소규모 환경영향평가 수립 용역 추진 계획 수립

○ ’17. 8.    기술용역 타당성 심사

○ ’17. 8.    소규모 환경영향평가 용역 발주

○ ’17. 9.    용역 계약 및 착수

○ ’17. 9.~  현황 조사 등 기초 조사

□ 준공기한 연기 내용

○ 준공기한 연기

- 당초 : 2017.9.26.~ 2018.12.28.

- 변경 : 2017.9.26.~ 2019.10.31.(307일 연장)

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 준공기한 연기 사유

-「서울디지털산업단지(G밸리) 개발계획(변경) 및 실시계획」 수립이 선행되어야 환경 영향 예측‧평가, 환경보전방안 수립 및 환경영향평가 협의 등 수행이 가능한 바,

-「서울디지털산업단지(G밸리) 개발계획(변경) 및 실시계획 수립」용역 핵심내용 중 하나인 용지변경 관련, 토지소유주 및 주민의견 수렴과 도시계획 부서 및 관계기관 협의 등으로 인해 불가피하게 과업기간이 연장됨에 따라 당 용역의 준공기한 연기가 필요함

□ 향후계획

○ 준공기한 연기 의뢰 : 재무과

※ 붙 임 :  합의각서 1부.     끝.