문서번호	교통운영과-21035
결재일자	2018.12.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		신호시설팀장	교통운영과장
이현준		代김선주	12/12 강진동
협 조

	2018년 도로교통 안전개선사업 교통신호기공사 감리용역 설계변경 검토 보고

2018. 12.

도시교통본부

교통운영과

2018년 도로교통 안전개선사업 교통신호기공사 감리용역

설계변경 검토 보고

2018년 도로교통 안전개선사업 교통신호기공사의 공사물량 변경에 따라 감리용역의 설계변경 사항을 검토하고 아래와 같이

보고합니다.

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 2018년 도로교통 안전개선사업 교통신호기공사 감리용역

○ 용역기간 : 2018. 4. 20. ~ 2018. 12. 28.

○ 계약금액 : 금192,945,000원

○ 계약업체 : ㈜태영알엔디  대표 서태교

□ 설계변경 검토

○ 설계변경 사유 및 세부사업별 공사비 변경 내역

- 아래와 같은 사유로 공사 물량 증감(24.3% 감소)이 발생하여 감리용역

대가 조정

[단위 : 원]

세부사업명	당초공사내역	공사금액			변경 사유
		당초	변경	증감
합 계		2,622,071,000	1,787,429,160	감834,614,840
보행불편해소를 위한 횡단보도 확충설비	웃말공원 등 16개소	690,200,000	361,756,125	감328,443,875	당초 16개소 시행예정이었으나 실시설계 결과 공사비부족 으로 10개소 만 시행
도로교통 소통개선	한양공고 앞 교차로 등 25개소	717,151,000	740,956,638	증23,805,638	일부 개소 교통신호기분야 추가 공사 물량 발생 (노후 제어반교체, 음향신호기 추가 설치 등)
교통사고 잦은 곳 개선	삼양입구 사거리 등 6개소	275,270,000	397,907,942	증122,637,942	당초 6개소 시행예정이었으나 실시설계 결과 공사비부족으로 5개소 만 시행하고 미시행분 1개소 교통신호기 공사 물량 증가
교통사망사고 줄이기 사업	흥인교차로 등 9개소	459,450,000	35,359,091	감424,090,909	당초 9개소 시행예정이었으나 실시설계 결과 공사비부족으로 4개소 만 시행
중앙버스전용차로 흐름개선	송파대로 등 9개소	480,000,000	251,449,364	감228,550,636	당초 9개소 시행예정이었으나 2개소는 공기부족으로 일부 구간만 시행하여 교통신호기공사공사물량 감소

- 2018년 도로교통안전개선 교통신호기공사 감리용역 변경계약 요청

[태영(신)2018-127호 2018. 12. 7.]

○ 용역금액 변경

[단위 : 원]

구분	변 경 내 역			비고
	당초	변경	증·감
총용역비	192,945,000	146,081,000	감)46,864,000
공급가액	173,870,000	131,639,000	감)42,231,000
손해배상공제료	1,535,000	1,162,000	감)373,000
부가가치세	17,540,500	13,328,100	감)4,260,400

□ 조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 설계변경 시행하고자 함

□ 향후 추진일정

○ 재무과로 설계변경 계약 의뢰

○ 변경계약 후 용역 준공

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 변경계약 요청서 공문사본 1부.  끝.