투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	「월드컵공원 단풍길 조성사업」설계변경 시행

공원운영과-16138(2018.12.12.)호와 관련,「월드컵공원 단풍길 조성사업」에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 월드컵공원 단풍길 조성사업

2. 공사기간 : 2018. 08. 13. ~ 12. 13.

3. 도 급 자 : ㈜이젠리버텍 대표 조보연

4. 소요예산

구 분		금 액(원)			비고
		당 초	변 경	증 감
총공사비		250,447,000	255,626,000	증5,179,000
도급비	공급가액	227,679,091	232,387,273	4,708,182
	부가세	22,767,909	23,238,727	470,818
	합 계	250,447,000	255,626,000	5,179,000

5. 변경사유 : 현장 여건에 따른 공종 및 물량 변동사항 발생

6. 예산과목 : 세계적인 환경·생태테마공원육성, 산하공원 운영, 월드컵공원 시설물

보수정비, 시설비

붙 임  1. 검토 보고서 1부

2. 변경설계도서 1부

3. 제비율 검증자료 1부.  끝.

주무관							유하현				주무관					류기혁					공원운영과장					배효성					서부공원녹지사업소장						12/12 오진완
협조자				주무관							김선희
시행			공원운영과-16181										(						)		접수												(						)
우	03901					서울특별시 마포구 월드컵로 243-60																/			http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화									/전송								/														/	대시민공개