투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	시설공사 설계변경(전체31회, 14차3회) 계약 의뢰 (강남순환도로4공구)

1. 우리 본부에서 시행중인 “강남순환도시고속도로(4공구)건설공사”에 대하여 설계변경(전체31회, 제14차3회) 계약의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(4공구)건설공사

나. 계약업체 : 롯데건설㈜

다. 변경내역                                                              (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감
공사기간	전체(31회)	`01.12.29~`19.11.30	`01.12.29~`19.11.30	변경없음
	금회(14차3회)	`18.1.5~`18.12.31	`18.1.5~`18.12.31	변경없음
계약금액	전체(31회)	198,362,000,000	198,370,000,000	증8,000,000
	금회(14차2회)	20,150,000,000	20,286,740,000	증136,740,000

라. 예산과목 : 도로계획과, 도로건설, 도시고속도로망 확충(도시개발특별회계), 강남순환도시고속도로건설, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 건설사업관리단 검토의견서, 변경내역서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	남덕희		도시고속도로과장	명경출		토목부장	12/12 김영수
협조자	주무관	박운용
시행	토목부-21036	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8666	/전송	02-3708-2599	/	heedeok@seoul.go.kr	/	부분공개(7)