“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	강변북로 천호-올림픽구간 도로전광표지 이설공사 설계변경 시행 및 계약의뢰(2차)

1. 교통정보과-18711(2018.12.03.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 추진중인 「강변북로 천호-올림픽구간 도로전광표지 이설공사」와 관련하여 아래와 같이 계약변경을 의뢰하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사업개요

- 계 약 명 : 강변북로 천호-올림픽구간 도로전광표지 이설공사

- 계 약 자 : ㈜사운드플레이스

- 계약금액 : 87,589,170원

- 계약기간 : 2018.7.27. ~ 2018.12.31.

나. 계약변경 내역 및 사유

- 변경사유 : 이설 예정지점에서 미확인 지장물의 추가발견으로 사업내용 변경

- 변경내역

구 분	당 초	변 경	증 감
준공기한	2018.12.31.	2018.12.19.	감 12일
계약금액	87,589,170원	34,563,230원	감 53,025,940원

- 예산과목 : 도시교통본부, 교통정보과, 과학적인 교통정보서비스 구현, 교통운영시스템 구축,
강변북로 도로전광표지 이설 및 소유물품 구매, 시설비(202-401-01)

붙임 : 1. 설계변경 방침서. 1부.

2. 실정보고 서류. 1부.

3. 계약변경 요청서류. 1부.

4. 합의각서. 1부. 끝.

	교통정보과장
주무관	장석민		교통정보팀장	김맹순		교통정보과장	12/13 代김맹순
협조자
시행	교통정보과-18723	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28(수송동) 종로소방서 5층 서울시 교통정보과	/	http://topis.seoul.go.kr/
전화	02-2133-4956	/전송	02-2133-4990	/		/	부분공개(5)