투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	계약 변경 의뢰-풍납토성, 나루터길 나들목 개선 전기공사(장기계속)

1. 기반시설과-3522(2018. 12. 13.)호와 관련입니다.

2. 우리 부에서 시행중인「풍납토성, 나루터길 나들목 개선 전기공사(장기계속)」에 대하여 아래와 같이 설계변경(총차 2회, 1차 2회, 2차 2회)을 하였기에 변경계약을 의뢰합니다.

가. 공 사 명: 풍납토성, 나루터길 나들목 개선 전기공사(장기계속)

나. 계약기간: 2017. 09. 27. ~ 2018. 12. 31.

다. 계약금액: 금283,406,000원

라. 도 급 자: 주식회사 선연이엔지(대표자: 장석선)

마. 변경내용:                                                           (단위: 원)

구 분	도급액
	당 초	변 경	증·감
총차	283,406,000	273,874,000	(감) 9,532,000
1차	188,477,000	181,087,000	(감) 7,390,000
2차	94,929,000	92,878,000	(감) 2,142,000

바. 변경사유: 계약 공종별 내역 및 수량 변경

사. 예산과목: 치수 및 하천관리, 하천복원 및 정비, 한강관광자원화사업, 시설비(국비)

붙임  1. 보고서 1부

2. 설계변경 내역서 3부

3. 검증확인서 3부.  끝.

	기반시설과장
주무관	이건용		기반시설과장	12/13 라철흠
협조자
시행	기반시설과-3525	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부 시설부 기반시설과	/
전화	02-3780-0652	/전송	02-3780-0744	/	lgyong77@seoul.go.kr	/	부분공개(5)