문서번호	공간정보과-8895
결재일자	2018.12.13.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설안전부장
김영혁		代홍석현	12/13 이규상
협 조
	주무관			홍석현
	주무관			박광수
	주무관			박현대

『2018년 상수도 GIS DB 정확도개선사업』

설계변경(1회) 및 2차분 용역 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

상수도사업본부

공간정보과

『2018년 상수도 GIS DB 정확도개선사업』

설계변경(1회) 및 2차분 용역 시행계획

『2018년 상수도 GIS DB 정확도개선사업』과 관련하여 설계변경(1회) 및 2차분 용역 시행계획을 보고 드림.

Ⅰ		용 역 현 황

□ 사업명 : 2018년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

□ 사업현황(측량 및 편집 : 782.7㎞, 6,349,500천원)

구 분		중부,서부지역	동부,북부지역	강서,남부지역	강남,강동지역
용역내용		측량 및 편집 : 195.5㎞ (신설29,기존166.5)	측량 및 편집 : 195.7㎞ (신설30,기존165.7)	측량 및 편집 : 195.7㎞ (신설32,기존163.7)	측량 및 편집 : 195.8㎞ (신설30,기존165.8)
용역기간	총차분	’18. 6. 12. ～ ’19. 3. 31.
	1차분	’18. 6. 12. ～ ’18. 12. 31.
* * * *	***	***********	***********	***********	***********
	***	***********	***********	***********	***********
*****		***** ******** *******	******* ****** ******	*************** ********	***** ********** *********

□ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비,

사무관리비(상수도 GIS 구축)

Ⅱ		설계변경 내용 및 사유

중부, 서부지역

□ 주요 공종 물량 변경

❍ 총차

공 종	단위	당초	변경	증감	비고
4급 기준점 측량	점	11.00	11.00	-
신규 지하시설물 조사/탐사	㎞	29.00	17.60	감 11.4
기존 지하시설물 조사/탐사	㎞	166.50	178.10	증 11.6
지하시설물도 정위치 편집	㎞	195.50	195.70	증 0.2
누수복구 현장 대응	건	46.00	20.00	감 26.0

❍ 1차

공 종	단위	당초	변경	증감	비고
4급 기준점 측량	점	11.00	11.00	-
신규 지하시설물 조사/탐사	㎞	7.90	12.00	증 4.1
기존 지하시설물 조사/탐사	㎞	166.50	178.10	증 11.6
지하시설물도 정위치 편집	㎞	174.40	190.10	증 15.7
누수복구 현장 대응	건	22.00	19.00	감 3.0

□ 설계변경 금액(용역비) : 총금액 변경없음(차수별 금액변경)

(단위: 원)

구 분	총 차 분	1 차 분	2 차 분	비고
***	*************	*************	***********
***	*************	*************	************
***	*	*************	*************

□ 설계변경 사유

❍ 당초 추정 물량으로 설계하였으나 사업이 마무리 단계에 도달함에 따라 실제 시행량에 맞추어 물량 조정 및 차수별 금액 설계변경 시행

동부, 북부지역

□ 주요 공종 물량 변경

❍ 총차

공 종	단위	당초	변경	증감	비고
4급 기준점 측량	점	11.00	11.00	-
신규 지하시설물 조사/탐사	㎞	30.00	26.50	감 3.5
기존 지하시설물 조사/탐사	㎞	165.70	169.60	증 3.9
지하시설물도 정위치 편집	㎞	195.70	196.10	증 0.4
누수복구 현장 대응	건	38.00	6.00	감 32.0

❍ 1차

공 종	단위	당초	변경	증감	비고
4급 기준점 측량	점	11.00	11.00	-
신규 지하시설물 조사/탐사	㎞	8.80	18.10	증 9.3
기존 지하시설물 조사/탐사	㎞	165.70	169.60	증 3.9
지하시설물도 정위치 편집	㎞	174.50	187.70	증 13.2
누수복구 현장 대응	건	19.00	6.00	감 13.0

□ 설계변경 금액(용역비) : 총금액 변경없음(차수별 금액변경)

(단위: 원)

구 분	총 차 분	1 차 분	2 차 분	비고
***	*************	*************	***********
***	*************	*************	************
***	*	*************	*************

□ 설계변경 사유

❍ 당초 추정 물량으로 설계하였으나 사업이 마무리 단계에 도달함에 따라 실제 시행량에 맞추어 물량 조정 및 차수별 금액 설계변경 시행

강서, 남부지역

□ 주요 공종 물량 변경

❍ 총차

공 종	단위	당초	변경	증감	비고
4급 기준점 측량	점	11.00	11.00	-
신규 지하시설물 조사/탐사	㎞	32.00	26.50	감 5.5
기존 지하시설물 조사/탐사	㎞	163.70	170.10	증 6.4
지하시설물도 정위치 편집	㎞	195.70	196.60	증 0.9
누수복구 현장 대응	건	43.00	39.00	감 4.0

❍ 1차

공 종	단위	당초	변경	증감	비고
4급 기준점 측량	점	11.00	11.00	-
신규 지하시설물 조사/탐사	㎞	11.20	16.10	증 4.9
기존 지하시설물 조사/탐사	㎞	163.70	170.10	증 6.4
지하시설물도 정위치 편집	㎞	174.90	186.20	증 11.3
누수복구 현장 대응	건	11.00	36.00	증 25.0

□ 설계변경 금액(용역비) : 총금액 변경없음(차수별 금액변경)

(단위: 원)

구 분	총 차 분	1 차 분	2 차 분	비고
***	*************	*************	***********
***	*************	*************	************
***	*	*************	************

□ 설계변경 사유

❍ 당초 추정 물량으로 설계하였으나 사업이 마무리 단계에 도달함에 따라 실제 시행량에 맞추어 물량 조정 및 차수별 금액 설계변경 시행

강남, 강동지역

□ 주요 공종 물량 변경

❍ 총차

공 종	단위	당초	변경	증감	비고
4급 기준점 측량	점	11.00	11.00	-
신규 지하시설물 조사/탐사	㎞	30.00	18.30	감 11.7
기존 지하시설물 조사/탐사	㎞	165.80	177.80	증 12.0
지하시설물도 정위치 편집	㎞	195.80	196.10	증 0.3
누수복구 현장 대응	건	32.00	23.00	감 9.0

❍ 1차

공 종	단위	당초	변경	증감	비고
4급 기준점 측량	점	11.00	11.00	-
신규 지하시설물 조사/탐사	㎞	8.80	10.90	증 2.1
기존 지하시설물 조사/탐사	㎞	165.80	177.80	증 12.0
지하시설물도 정위치 편집	㎞	174.60	188.70	증 14.1
누수복구 현장 대응	건	13.00	20.00	증 7.0

□ 설계변경 금액(용역비) : 총금액 변경없음(차수별 금액변경)

(단위: 원)

구 분	총 차 분	1 차 분	2 차 분	비고
***	*************	*************	***********
***	*************	*************	************
***	*	*************	*************

□ 설계변경 사유

❍ 당초 추정 물량으로 설계하였으나 사업이 마무리 단계에 도달함에 따라 실제 시행량에 맞추어 물량 조정 및 차수별 금액 설계변경 시행

Ⅲ		2차수 계약

□ 용역기간 : ’19. 1. 1.~’19. 3. 31.

□ 용역현황

구 분	중부,서부지역	동부,북부지역	강서,남부지역	강남,강동지역
용역내용 (신규,㎞)	5.6	8.4	10.4	7.4
***** *****	********	********	********	********

Ⅳ		향 후 계 획

□ 용역 성과품 1차 준공 처리   : 2018. 12. 21.

□ 완료보고회 개최              : 2019.  3.(예정)

□ 용역 최종 준공 처리          : 2019.  3. 31.

붙임 : 1. 설계변경 내역서(총차,1차) 각 1부.

2. 2차수 계약내역서 각 1부.  끝.