문서번호	도로보수과-11487
결재일자	2018.12.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
박성근		유태용	12/14 김용제
협조

2018년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

설계변경 검토보고(최종)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

강서도로사업소

(도로보수과)

2018년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

설계변경 검토보고(최종)

우리사업소에서 시행중인『18년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사』시책사업 완료보고 및 본 공사 물량 증·감에 따른 최종 설계변경 검토보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 노면표시 시책사업 시행계획 보고【3327호(‘18.4.11.)】

○ 여의서로 자전거도로 정비 완료보고【8828호(‘18.9.27.)】

○ ‘18년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 낙찰차액 사용계획【10067호(‘18.11.2.)】

○ ‘18년 주행유도선 확대설치(추가분) 사업 작업완료 보고【10385호(‘18.11.12.)】

○ 여의서로 자전거도로 2차 정비사업(노면표시) 작업완료 보고【10661호(‘18.11.20.)】

○ 시책사업 작업완료 보고【11305호(‘18.12.11.)】

○ ‘18년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 제12차 작업지시 계획 보고【11306호(‘18.12.11.)】

Ⅱ		사업개요

○ 공 사 명 : 2018년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 공사개요 : 차선도색 및 제거 L=305,500m, 도로표지병 설치 및 제거 N=320개소

○ 공사기간 : 2018. 3. 8. ~ 2018. 12. 31.

○ 공 사 비 : 980,880천원

(도급비 723,101천원, 관급비 257,293천원, 이설비 486천원)

○ 도 급 자 : (주)세흥실업  대표 김덕자

Ⅲ		주요공종 및 사업비 변경 현황

○ 주요공종 변경 현황

연번	공 종	단위	수 량		비고(사유)
			당 초	변 경
1	차선(재)도색	m	289,400	332,940	- 시책사업 물량 반영(완료보고) 본 공사(긴급복구, 굴착복구 포함) 공종별 물량 증·감 반영
2	차선제거	m	16,100	21,034
3	도로표지병 철거 및 설치	개소	320	182
4	시선유도봉 철거 및 설치	개소	0	24

○ 시책사업별 완료보고 : 사업별 계획 및 완료(붙임 참조)

○ 예산별 정산금액

(단위 : 원)

사 업 명	정산금액			비 고
	총 공사비	도급비	관급비
노면표시 도색 및 제거	828,569,870	608,146,000	220,423,870
노후포장도로정비공사 (18년 포장도로 긴급복구)	95,768,560	70,203,000	25,565,560
도로굴착복구공사 (18년 포장도로 굴착복구)	114,762,680	84,067,000	30,695,680
도로교통소통개선사업	13,383,230	11,947,000	1,436,230
중앙버스전용차로 흐름개선사업	105,748,620	96,103,000	9,645,620
자전거도로 유지보수(1,2단계)	8,279,880	5,089,000	3,190,880
주행유도선 확대설치 사업	21,240,760	13,509,000	7,731,760
계	1,187,753,600	889,064,000	298,689,600

○ 최종 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감
총 공사비	980,880,550	1,187,753,600	증) 206,873,050
도 급 비	723,101,000	889,064,000	증) 165,963,000
관 급 비	257,293,000	298,689,600	증) 41,396,600
이설비및기타	486,550	0	감) 486,550

Ⅳ		조치계획

○ 시책사업 완료보고 내역 및 본 공사 공종별 물량 증·감, 관급자재 물량 변경을 반영하여 위와 같이 최종 설계변경을 시행하고자 함.

붙 임  1. 설계변경내역서 및 사업별 준공내역서 1부.

2. 방침서 각 1부.

3. 제비율 검증표 1부.  끝.