문서번호	기전과-6127
결재일자	2018.12.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김용문		임태수	12/14 박기범
협조

「2018년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가)」

설계 변 경(제2차) 검 토 보 고

2018. 12.

남부도로사업소

(기 전 과)

『2018년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가)』

설 계 변 경(제2차) 검 토 보 고

「2018년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사」와 관련하여 책임감리원으로부터 제출된 설계변경 보고에 대해 아래와 같이 검토 보고드림.

		관 련 근 거

〇 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 시행령 제74조

〇 제3차 작업완료 및 공사실정 검토보고 : 기전과-6048(’18.12.11)

〇 감 리 사 : 설계변경 승인요청

- ㈜트래픽스, TR-본-1224(2018.12.13)

		사 업 개 요

〇 사 업 명 : 2018년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가)

〇 사업위치 : 관악, 금천, 동작, 서초, 영등포구 일부

〇 사업내용 : 관내 교통안전시설 설치 및 유지보수

〇 계약금액 : ************

〇 계약업체 : ************

〇 계약기간 : ‘18. 2.27. ~ 12. 28.

〇 감리업체 : *************

		추 진 경 위

〇 ’18. 3.12. : 제1차 작업지시

〇      3.27. : 제1차 작업지시(추가1)

〇      4.05. : 제1차 작업지시(추가2)

〇      4.16. : 제1차 작업지시(추가3)

〇      4.27. : 제1차 작업지시(추가4)

〇      5.31. : 제1차 작업지시 완료보고(감리)

〇      7.31. : 제1차 기성준공(금30,166,560원)

〇      6.15. : 제2차 작업지시

〇      7.19. : 제2차 작업지시(추가1)

〇      8.20. : 제2차 작업지시(추가2)

〇      8.31. : 제2차 작업지시 완료보고(감리)

〇      9.14. : 제3차 작업지시

〇      9.19. : 제3차 작업지시(변경)

〇     10.24. : 제3차 작업지시(추가1)

〇     11.05. : 제3차 작업지시(추가2)

〇     11.13. : 제3차 작업지시(추가3)

〇     12.10. : 제3차 작업지시 완료보고(감리)

※ ’18년 12월 현재 경찰청 요청 및 일상보수 220건 처리 완료

		설계변경사항

〇 설계변경 사유 : 경찰청 규제사항 등 물량변경에 따른 수량 변경

〇 주요 설계변경 내용

호 표	품 명	단위	당초	변경	증·감	비고
1-13h	규격사각 600*300 - 신설	매	1	15	증14
2-10h	중형원형∅780 - 교체	매	1	17	증16
3-15h	문안수정(고소용)	m²	4	24.4	증20.4
5-3h	고소용표지 - 신설	매	35	63	증28
5-6h	고소용표지 - 철거	매	5	35	증30
9-1h	발광형표지판 - 신설	SET	1	26	증25

※ 물량 변경 세부내역 : 붙임 - “설계변경 내역서” 참조

〇 제경비 정산

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
직접재료비	41,821,189	37,730,353	감)4,090,836
직접노무비	16,676,439	20,326,922	증)3,650,483
간접노무비	1,884,437	2,296,942	증)412,505
산재보험료, 고용보험료	913,194	1,113,093	증)199,899
건강보험료, 연금보험료 퇴직공제부금, 노인요양보험료	0	0	0
산업안전보건관리비, 환경보존비 등	542,845	0	감)542,845
경비(기계, 기타)	5,562,245	5,648,825	증)86,580
간접비(일반관리비, 이윤 등)	8,454,879	8,739,093	증)284,214
합 계	75,855,228	75,855,228	0

※ 제경비검증확인서 : “따로붙임”

〇 설계변경금액 : 금액 변동 없음                 (단위 : 원)

구 분		금 액			비 고
		당 초	변 경	증 · 감
도급비	공 급 가 액	75,855,228	75,855,228	-
	부가가치세	7,582,222	7,582,222	-
	합 계	83,437,450	83,437,450	-

◼ 예산과목 : 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리, 교통사업특별회계, 교통안전표지 설치 및 유지보수, 시설비

〇 책임감리원 기술검토 의견

◼ 제2, 3차 작업 물량내역 조정 및 제정비 정산 등을 반영하여 설계변경을 실행하는 것이 타당하다 사료됨.

		보고자의견

〇 책임감리원이 설계변경 요청한 사항을 검토한 결과,

- 제2, 3차 작업물량 변경 및 제경비 정산 등으로 책임감리원의 설계변경 검토의견이 타당함으로 이를 반영하여 설계변경을 시행하고자 함.

〇 설계변경 후 준공(검사) 처리하여 해당사업을 완료하고자 함.

		행 정 사 항

〇  ‘18.12월 : 설계변경시행

〇      12월 : 준공

붙  임 : 1. 책임감리원 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 제경비검증확인서 1부. 끝.