문서번호	기전설비과-9622
결재일자	2018.12.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
이상록		조성태	12/14 유성종
협 조
	기획예산과장			김형규
	재무회계과장			김분숙

- 영등포정수센터 탈수설비 개량사업 -

실정보고 및 2차 설계변경 계획 보고

2018. 12.

상수도사업본부

【 생산부】

- 영등포정수센터 탈수설비 개량사업 -

실정보고 및 2차 설계변경 계획 보고

‘영등포정수센터 탈수설비 개량’사업의 배관공사가 완료됨에 따라 도면과 시공물량을 점검하고 차이를 조정함.

Ⅰ		배관공사 현황

□ 사업 현황

◯ 계 약 명 : 영등포정수센터 탈수설비 개량 배관공사

◯ 계약기간 : 2018.07.02. ~ 2018.12.20.

◯ 계약금액 : 금231,464천원(최초)

◯ 주요내용 : 슬러지,약품,세정수 펌프 및 배관류 설치 등

Ⅱ		실정보고

□ 도면 대비 시공물량 차이 반영

◯ 세척수 펌프 용량 변경(37 ⇨ 30kW)        – 감)   2,758천원

◯ 작업발판 계단 및 믹싱탱크 점검 발판 등 설치 – 감)   3,297천원

□ 유지관리부서 요청사항 반영

◯ 작업발판 계단 및 믹싱탱크 점검 발판 등 설치 – 증)   5,622천원

◯ 슬러지이송펌프 전자식 유량계 4대 교체       – 증) 15,712천원

◯ 컨베이어벨트 점검용 이동식 점검대            – 증)    828천원

Ⅲ		설계변경

□ 변경계약 시행

◯ 도면 대비 시공물량차이 반영

◯ 유지관리부서 요청사항 반영

구분	최초 계약	1차 변경	2차 변경(금회)
단위:천원	231,646	253,956	268,305

◯ 최초 계약금액 대비 36,659천원(16%) 증가

Ⅳ		행정사항

1) 재무회계과 설계변경 심사의뢰

2) 변경사항 발생에 따른 재계약(설계변경 심사결과 및 재경비 정산반영)

3) 준공처리

붙임  1.변경내역서  1부.

2.변경도면    1부.  끝.