문서번호	시설과-3200
결재일자	2018.12.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
여은솔	김영균	代송복식	12/14 안수연
협 조

「보라매공원 테마 물놀이터 조성공사」

준공기한 연기 검토보고

2018. 12.

동부공원녹지사업소

(시  설  과)

「보라매공원 테마 물놀이터 조성공사」

준공기한 연기 검토보고

「보라매공원 테마 물놀이터 조성공사」의 준공기한 연기를 검토하고
아래와 같이 보고 드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 보라매공원 테마 물놀이터 조성공사

○ 공사기간 : 2018. 9. 10. ~ 2018. 12. 22.

○ 도 급 액 : 금260,933,900원(금이억육천구십삼만삼천구백원)

○ 도 급 자 : ***************

○ 공사내용 : 물놀이형 수경시설 및 기계설비 설치 등

□ 추진경위

○ 2018. 01. 25.  추진계획 수립

○ 2018. 02. 28.  실시설계용역 착수

○ 2018. 05. 16.  실시설계용역 준공

○ 2018. 09. 07.  공사 계약

○ 2018. 09. 10.  공사 착공

○ 2018. 12. 03.  준공기한 연기(1차)

□ 준공기한 연기 검토

○ 준공기한 변경사항

구 분	계약기간	비 고
당 초	2018. 09. 10. ~ 2018. 12. 22.
변 경	2018. 09. 10. ~ 2019. 04. 30.

○ 연기사유

- 수목식재 추가 등 발주처 요청사항 이행을 위한 공사기간 필요

- 동절기 기온 급강하로 잔여공정 진행시 품질확보 곤란

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

- 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

□ 검토의견

○ 시공사로부터 제출된 준공기한 연기사유가 타당하다고 판단되므로 계약부서에 준공기한 연기 요청하고자 함.

□ 향후계획

○ 2018. 12. 14. : 준공기한 연기 요청

○ 2019. 3. ~ 4. : 공사 재개 및 어린이 놀이시설 설치검사

○ 2019. 4. : 공사 준공

붙   임 : 1. 준공기한 연기 검토서(서울시설공단) 1부.

2. 준공기한 연기 요청서(시설공단, 시공사) 1부.

3, 변경예정공정표 1부.  끝.