투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	최종 설계변경 시행-18년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

우리사업소에서 시행중인 『2018년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)』최종 설계변경을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2018년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2018. 3. 8. ~ 2018. 12. 31.

다. 공사개요 : 차선도색 및 제거 L=305,500m, 도로표지병 설치 및 제거 N=320개소

라. 도 급 자 : (주)세흥실업 대표 김덕자

마. 변경사유 : 시책사업 완료 및 공종별 물량 변경 반영

바. 변경내역

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증, 감	비 고
도급비	공급가액	657,364,546	808,240,000	증) 150,875,454
	부 가 세	65,736,454	80,824,000	증) 15,087,546
	계	723,101,000	889,064,000	증) 165,963,000

사. 예산과목

- 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리, 노면표시 도색 및 제거, 시설비

【577,034,000원+32,352,760원】

- 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 노후포장도로정비공사, 시설비

【90,900,000원-20,697,000원】

- 도로시설물 관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사, 시설비

【44,800,000원+39,267,000원】

- 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리, 주행유도선 확대설치, 시설비

【10,367,000원+1,901,240원】

- 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리, 도로교통 소통개선, 시설비

【11,947,000원】-품의번호 NO43

- 도시교통체계 및 소통개선, 버스서비스이용제고, 중앙버스전용차로 흐름개선, 시설비

【96,103,000원】-품의번호 NO44

- 자전거 이용 활성화 및 교통환경개선, 자전거 이용시설 확충 및 관리, 자전거도로 안전시설 확충, 시설비【5,089,000원】-품의번호 NO45

붙 임  1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 및 제비율 검증표 각 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	박성근		도로보수과장	유태용		강서도로사업소장	12/14 김용제
협조자	관리단속과장	김상두
시행	도로보수과-11551	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237 (마곡동67-1) 강서도로사업소	/
전화	02-2657-7942	/전송	02-2657-7960	/		/	부분공개(5)