문서번호	도시철도토목부-14624
결재일자	2018.12.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
노권호		윤방식	12/14 정대현
협조
	주무관		김용선

『지하철9호선 3단계 920공구 건설공사』

차도복구 등 실정보고에 대한 검토보고

2018. 12.

도시철도토목부

「서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사」

차도복구 등 실정보고에 대한 검토보고

「서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사」와 관련 차도복구 등 실정보고에 대한 검토 보고임.

1		사업개요

❍ 공 사 명: 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사

❍ 위    치: 서울시 송파구 석촌역~올림픽공원 남4문사거리

❍ 규    모: 총연장 1,390.5m(정거장 1개소, 본선환기구 4개소)

❍ 공사기간: 2009.12.31. ~ 2018.12.31.

❍ 도 급 비: **********

❍ 시 공 사: 롯데건설(주)외 1개사

❍ 감 리 사: 벽산엔지니어링(주)외 3개사

2		보고내용

□ 관련근거

❍ 입찰안내서 제3장 계약조건(공사계약일반조건) 제19조(설계변경 등) 제1항 제4호

- 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정한 경우 등

❍ 입찰안내서 제3장 계약조건(공사계약일반조건) 제19조의5

(발주기관의 필요에 의한 설계변경) 제1항

- 당해공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생

- 공정계획의 변경

- 시공방법의 변경

- 기타 공사의 적정한 이행을 위한 변경

❍ 입찰안내서 제3장 계약조건(공사계약일반조건) 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제2항

- 발주기관이 설계변경을 요구한 경우(계약상대자의 책임없는 사유로 인한 경우)

❍ 입찰안내서 제3장 계약조건(공사계약일반조건) 제21조(설계변경으로 인한 계약금액의 제한 등) 제4항 제1호

- 사업계획 변경 등 발주기관의 필요에 의한 경우

□ 차도복구 추가금액

❍ 적용수량

구 분	단위	당 초	변 경	증 감
표층포장	a	******	******	********
아스팔트 절삭	a	**	******	********
표층자재(#78)	Ton	*******	**	*********
표층자재(PG64-22, 1등급, WC-3)	Ton	**	********	**********
표층자재(PG76-22, 1등급, WC-5)	Ton	*	*******	*********
표층자재(재생)	Ton	*	******	********
각종 맨홀인상	개소	*	**	****

- 도로유지관리 기관(동부도로사업소, 송파구)요구에 따라 추가포장

❍ 공사비 증‧감 내용                                 (단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 감
직접공사비	*******	********	**********
제 경 비	*******	********	**********
공 급 가 액	*******	*********	***********

□ 보도복구 추가금액

❍ 적용수량

구 분	단위	당 초	변 경	증 감
보도블록설치	a	*****	*****	******
시각장애인용 점자블록	㎡	***	***	*****
보차도경계석설치 (200 x 300 x 1,000)	m	***	*	*****
보차도경계석설치 (200 x 250 x 1,000)	m	*	*****	*******
도로경계석설치	m	*****	*****	****
자전거도로설치	㎡	*****	***	*****
MMA도막포장	㎡	**	***	*****
볼 라 드	개소	*	**	****

- 도로유지관리 기관(송파구) 요청사항 반영

❍ 공사비 증‧감 내용                              (단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 감
직접공사비	*********	********	**********
제 경 비	*******	*********	**********
공 급 가 액	********	*********	***********

□ 가로등복구 추가금액

❍ 적용수량

구 분	단위	당 초	변 경	증 감
가로등 지주(흑관)	주	**	*	****
가로등 지주 (아연도금강관, 서울시 디자인 승인)	주	*	**	****
CDM등	개소	**	*	****
LED등 (투광등 포함)	개소	*	**	****

- 송파구 추가 요구사항 반영

❍ 공사비 증‧감 내용                              (단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 감
직접공사비	********	*********	**********
제 경 비	*	*******	**********
공 급 가 액	*******	********	***********

□ 신호등복구 추가금액

❍ 적용수량

구 분		단위	당 초	변 경	증 감
지주설치 (흑관 → 디자인 지주)		본	*	**	****
잔여시간표시기		조	*	**	****
음향신호기		EA	*	**	****
신호케이블	가공선	m	*	***	*****
	지중선	m	*	*****	*******
차선도색		㎡	*****	*	*******
노면공사		m	*	******	********
신 호 등		EA	**	*	****

- 동부도로사업소 요구사항 반영

❍ 공사비 증‧감 내용

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 감
직접공사비	*****	*******	*********
제 경 비	******	*******	*********
공 급 가 액	******	*******	*********

□ 폭염 작업중지 임금보전

❍ 적용수량 및 임금보전 내용

(단위:천원)

구 분	작업시간 단축 임금현황				비 고
	수 량	손실시간	손실율	금 액
인 건 비	**	***	***	*****
장 비 비	*	***	***	*****
합 계				*****

- 2018.08.07.: 폭염경보 발효시 건설(옥외)근로자 임금보전 후속조치

□ 이롬빌딩 정화조 축소 추가금액

❍ 적용수량

구 분	단위	당 초	변 경	증 감
정화조 구조물 공사	식	*	*	***

- 본선개착 2구간 흙막이 가시설(사유지 구간) 정화조 저촉

❍ 공사비 증‧감 내용                                (단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 감
직접공사비	-	******	********
제 경 비	-	******	********
공 급 가 액	-	******	********

□ 홍보동영상, 포스터 추가금액

❍ 9호선 3단계 개통관련 홍보동영상 및 포스터 제작

❍ 공사비 증‧감 내용                              (단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 감
홍보 자료 제작	-	********	********
공 급 가 액	-	********	********

3		책임감리원 검토의견

❍ 시설물 유지관리기관 추가 요청사항(차도, 보도, 가로등, 신호등)을 반영한 것으로 시공수량과 공사비는 적정하게 산출되었으며, 추후 설계변경시 계약금액 조정필요.

❍ 발주기관 요청사항(폭염 작업중지 임금보전, 이롬빌딩 정화조축소, 홍보영상물 및 포스터 제작)을 반영한 것으로, 추후 설계변경시 계약금액 조정 필요.

4		조치계획

❍ 시설물 유지관리 기관 및 발주기관의 요청사항을 반영한 것으로 책임감리원 의견과 같이 승인하고, 향후 설계변경 조치 및 총사업비 변경시 반영코자 함.

붙임  책임감리원 실정보고 각1부.  끝.