투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	계약변경(총차, 1차) 요청(시립중랑노인전문요양원 증축공사)」

1. 건축부-18164(2018. 12. 14.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 「시립중랑노인전문요양원 증축공사」와 관련하여 계약변경(총차, 1차)을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 시립중랑노인전문요양원 증축공사

나. 계 약 자 : 용성종합건설(주) 외 1개사

다. 계약변경 요청내용(총차, 1차)

구 분		변경 전	변경 후	증 감
**	****	*************	*************	************
	****	***********************	***********************	****
**	****	*************	*************	***********
	****	***********************	***********************	****

라. 변경사유 : 현장여건 반영, 설계도서 누락.오류, 발주처 지시사항 등 반영하고, 공사 미 시공분 1차수 일부조정

붙임  1. 설계변경(총차, 1차(3회)) 검토보고서 1부.

2. 변경전후 내역서(총차, 1차) 및 합의각서 각1부.(별도송부)  끝.

	건축부장
★주무관	문성재		의료시설과장	이형재		건축부장	12/14 임인구
협조자	경리과장	이현숙
시행	건축부-18283	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어 플레이스빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2616	/전송	02-3708-2659	/	msj2061@seoul.go.kr	/	부분공개(5)