문서번호	시설과-11737
결재일자	2018.12.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	시설과장
문정주	전결 12/14 송병욱

「수유6배수지 건설공사」

계약금액조정 심사 소위원회 개최

2018. 12.

상수도사업본부

(시설안전부)

「수유6배수지 건설공사」

계약금액조정 심사 소위원회 개최

사업개요

❍ 규    모 : 배수지 확충 3,100㎥(기존 3,000 ㎥ ⇒  6,100㎥)

송배수관부설 500~600㎜, 연장 990m

❍ 기    간 : ’17. 12. 13.~’20. 5. 30.

❍ 도 급 비 : 2,667백만 원

❍ 시 공 사 : 영동건설㈜ 외 1개사

❍ CM 사 : ㈜한국종합기술 외 1개사

계약금액 조정 내용

❍ 본 공사는 ‘시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법’에서 정한 1종 시설물 건설공사로 ‘안전관리계획서’ 수립대상이나, 설계 시  이에 대한 작성비가 누락되어 반영 필요

- 설계사에 안전관리계획서 작성비 반영 여부 확인결과 미반영 확인

❍ 추진경과

- ’18. 12. 12.  : 실정보고(CM → 본부)

- ’18. 12. 13. : 실정 보고 승인(본부 → CM)

- ’18. 12. 14. : 계약금액 조정 검토(CM → 본부)

❍ 공사비 증․감 현황(증 3,850천원)

(단위:원)

공종명	규격	단위	당 초		변경		증·감 (변경-당초)
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
합계						3,850,000		3,850,000
안전관리계획서 작 성 비 용		식			1	3,500,000	1	3,500,000
부가가치세						350,000		350,000

설계변경 근거

❍ 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 공사계약 일반조건 제6절의 공사 설계 변경 사항에 해당

소위원회 개최

❍ 일  시 : ’18. 12. 17.(월) 14:00

❍ 기  간 : 시설안전부 회의실

❍ 심사위원

- 팀 장 : 시설과장

- 팀 원

소 속	직급	성명
시설과	시설6	최이영
	시설7	차승현
	시설7	김민식

붙 임 : 1. 관련 실정보고 검토 및 승인 방침서 1부.

2. 계약금액조정 심사 내역 1부.  끝.