문서번호	기전과-11712
결재일자	2018.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
정영술		서수일	12/14 이학구
협조

설계변경 보고(2차-최종)

-2018년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)-

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

서부도로사업소

(기전과)

설계변경 보고(2차-최종)

-2018년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)-

2018년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가) 관련 당초 계약 물량

변경에 대해 시공 감리의 설계변경 요청(2차)이 있어 내용을 검토하고

설계 변경코자 함.

□ 관련근거

○ 기전과-9258(2018. 10. 5.): 낙찰차액 사용계획 보고

○ 설계변경(2차): TR-본-1223(2018. 12. 14.)호

□ 공사개요

○ 공사명: 2018년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

○ 공사위치: 서부도로사업소 관내(시도)

○ 공사내용: 교통안전표지 신설, 교체, 철거, 이설 등 1식

○ 계약금액: 금84,100,900원

○ 공사기간: 2018. 2. 28.∼2018. 12. 31.

○ 계약업체: ㈜아이디포커스  대표 강우영

○ 감리업체: ㈜트래픽스  대표 김희수

○ 예산과목: 도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전

시설물 관리, 교통안전표지 설치 및 유지보수, 시설비(401-01)

□ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감
공사금액	84,100,900	93,710,000	증)9,609,100

□ 설계변경 및 정산 내역

○ 변경내역: 당초 626 → 변경 772(증 146)

- 교통안전표지 신설: 302→ 318(증 16매)

- 교통안전표지 교체: 161→ 240(증 79매)

- 교통안전표지 철거: 12→ 23(증 11매)

- T형부착대 및 교차로대: 125→ 155(증 30세트)

- 철주 및 편주: 13→ 22(증 9세트)

- 도장 및 이설,복구,위치조정: 13→ 14(증 1개소)

※ 물량 변경에 따른 재료비, 노무비, 제경비 등 변경

○ 제경비 정산액: 감)2,357,692원

- 건강∙연금∙노인장기요양 보험료: 감)748,759원

- 산업안전보건관리비: 감)1,077,209원

- 환경보전비: 감)531,724원

※ 정산사유: 제경비 정산 서류 미제출

□ 설계변경 사유

○ 민원 처리를 위해 당초 계약 물량 변경내역 설계 반영

○ 경찰청 교통안전시설 규제 관련 물량 변경내역 설계 반영

○ 제경비 정산처리

□ 검토의견

○ 공종별 물량 조정, 미사용 보험료 등 제경비를 정산 반영하여 설계변경

시행코자 함.

□ 행정사항

○ 설계변경(내역)에 대해 변경 계약 요청→ 관리단속과

붙임  1. 설계변경서류 제출(2차) 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 낙찰차액 사용 방침서 1부.  끝.