【별지 제1호서식】

공사 변경계약 심사요청서(영등포 탈수설비 배관공사)

부분공개(7)

시 행	기전설비과-9623
시행일자
수 신 자	재무회계과장
접수번호
접수일자

주무관		기전설비과장				결재
이상록		12/14 조성태
협 조

공 사 명	영등포정수센터 탈수설비 개량 배관공사				요청기관	상수도사업본부 생산부
공사위치	영등포정수센터 탈수기동 (서울특별시 영등포구 소재)
공사기간	2018.07.02.~2018.12.20.		계약방법				지역제한 경쟁입찰
공사금액	․최초계약금액 : 231,464,300원			․변경계약금액 : 268,305,450원 최초계약금액 대비 증)36,841,150원
	․1차 변경계약 : 253,956,660원
예산내역	세부사업명	예산과목						예산(추산)잔액
	정수장시설 정비	자본적지출, 유형자산취득, 기계장치,시설비및부대비,시설비						199,399천원
계약 대상	․상 호 : 영풍진흥기업(주) ․ 대 표 자 : 김광남 ․등록 번호 : 106-81-08518
발 주 처	․담 당 자 : 이상록 (전화번호 : 02-3146-1335)
○ 주요 변경사항 - 기자재비 : 이동식 계단사다리 2대 - 배관설치 : 도면 대비 시공물량 차이 반영 - 전자식 유량계 4대 추가 - 약품펌프 4대 및 세정수 펌프 2대 사양변경
○ 붙임 1. 설계변경 방침서 1부 2. 설계변경 관련자료(변경내역서, 도면) 각1부.

	기전설비과장

변경 내역서

(붙임 문서 참조)

끝.