문서번호	시설보수과-7161
결재일자	2018.12.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김원선		윤승범	12/14 이성재
협조
	★주무관		이석근

『소화조 보수공사 건설사업관리 용역』

준공기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『『소화조 보수공사 건설사업관리용역』

준공기한 연기 검토 보고

우리센터에서 시행중인 『제3처리장 소화조 보수공사 』의 건설사업관리용역  건에 대한 시공감리용역 기간연장 및 설계변경 보고 임.

1		용역개요

□ 용 역 명 : 소화조 보수공사 건설사업관리용역

□ 용역기간 : 2018.09.20.~2018.12.18.

□ 용 역 사 : ㈜동해종합기술공사 대표 정점래

□ 용 역 비 : 15,466,000원

□ 용역내용 : 소화조 15개소(제3처리장 소화조 1~14지, 제2처리장 8지

2		보고내용

□ 건설사업관리용역 계약 후 제3처리장 소화조(1~12지) 보수공사(공사기간 ~‘18.12.31.)가 진행 중에 있으나 시공감리용역 기간이 12월 18일로 만료 됨에 따라 시공감리 수행이 단절되어 본 공사완료시까지 건설사업관리용역 용역기간 연장이 필요한 실정임.

3		검토결과

□ 위와 같은 실정으로 원할한 공사시행 및 공사 준공관련 업무수행 등으로 건설사업관리용역 기간을 연장하여 원할한 공사시행 및 시공감리에 만전을 기하고자 합니자.

※ 본 공사(소화조 보수공사)의 공사기간과 시공감리용역 기간의 공백 발생으로 본공사 준공시까지 용역기간 연장

4		조치의견

□ 본 공사 준공시까지 용역계약기간을 아래와 같이 연기하고자 함

- 준공기한 연기

• 당초 : 2018. 9.20.~2018. 12. 18.

• 변경 : 2018. 9.20.~2018. 12. 24.

- 용역금액 설계변경

구 분		당초금액	변경금액	증ㆍ감	비 고
총공사비		15,466,000	16,940,000	증) 1,474,000
도급비	공급 가액	14,060,000	15,400,000	증) 1,340,000
	부가가치세	1,406,000	1,540,000	증) 134,000
	계	15,466,000	16,940,000	증) 1,474,000

- 연기사유 : 본 공사 준공시까지 용역기간 연장

- 지체상금부과 여부 : 미부과  끝.