문서번호	물재생계획과-15244
결재일자	2018.12.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하수관리팀장	물재생계획과장
김영희		이인규	12/14 하상문
협 조

『서울시 하수도사업 관리용역(2차)』준공검토 보고

2018. 12.

서울시 하수도사업 관리용역(2차) 준공검토보고

우리시 하수도사업을 체계적이고 효율적으로 관리하기 위하여 시행중인 『서울시 하수도사업 관리용역(2차)』을 완료하였기에 보고드림

Ⅰ		용 역 개 요

□ 용 역 명 : 서울시 하수도사업 관리 용역

□ 총용역비 : 2,739,379천 원 (2차 1,000,000천원)

□ 용역기간 : 2017.7.3. ~ 2020. 6.16. (장기계속공사)

- 1차 : 2017.7.3. ~ 2018.3.31.

- 2차 : 2018.4.1. ~ 2018.12.31.

□ 용역사 : ㈜동해종합기술공사, ㈜삼안, ㈜이산, ㈜도화엔지니어링

□ 주요 과업내용

- 침수, 도로함몰 등 긴급상황 발생시 대응·복구방안 마련

- 하수도사업 검토 및 기술지원(계획·설계·시공·유지관리 분야 등)

- 서울시 하수도 품질향상 방안 마련

- 자치구 하수도 공사현장 지도점검 및 교육 등

Ⅱ		용역 추진경위

□ 2017.07.03. : 용역계약 및 착수(총차 및 1차)

□ 2018.03.31. : 장기-1차 준공

□ 2018.04.01. : 장기-2차 착수 및 사업관리 업무수행

Ⅲ		주요과업 수행내용

□ 하수관로 정비사업 타당성 검토 및 사전검토회의 자료 작성

○ 2018년도 추경 : 신설개량 및 원형관로 보수공사 20건

○ 2019년도 : 신설개량 및 원형관로 보수공사 63건

□ 침수지역 현장조사 등 긴급시설 개선대책 수립

○ 2018.8. 침수지역(신촌, 안국역) 수리분석 및 정비방안 마련

○ 중구 세종대로 125 일대 노면수 배수불량 지역 정비방안 검토 등

□ 내수재해위험지구 43개소 단계별 추진계획 수립

□ 공공하수도 사업계획 및 설계검토

○ 중화2빗물펌프장 유입관로 신설, 대성사 일대 하수관로 정비, 방배로 하수관로 신설, 구로동 139번지 일대 침수방지 등 8건 설계검토 시행

□ 하수관로 정비사업 시공관리 (공사장 점검, 품질점검, 기술지원 등)

○ 2018년도 하수도 공사장 품질점검 및 기술지원(상·하반기)

○ 우기전 하수관로 청소 추진실태, 주요지역 빗물받이 점검

○ 도로함몰 예방 사업 공사장 점검 및 품질개선방안 마련, 관계자 교육 등

□ 진행중인 업무(3건)  ☜ 3차계약으로 연속시행 후 정산 예정

○ 하수암거 안전점검 대가기준 검토 (19.1월 자문회의 예정)

○ 하수도분야 업무편람 개정 (18.11월 업무지시, 19년 3월 완료 예정)

○ 하수도공사 품질향상방안 마련 (장기과제)

Ⅳ		계약변경 검토

□ 계약기간 : 변경없음

□ 계약금액 : 2차분 계약금액 변경 (총차금액은 변경없음)

○ 변경사유 : 장기계속사업으로 금차에서 현재 진행중인 과업은 금차분에서 미정산되므로 금차분 계약금액을 변경하고, 3차분 계약으로 연속 시행후 정산처리

○ 용역비 변경

(단위 : 천원)

구분	총차금액	1차	2차	3~4차	비고
당 초	2,739,379	555,687	1,000,000	1,183,692
변 경	2,739,379	555,687	909,337	1,274,355
증·감	-	-	감 90,663	증 90,663

Ⅴ		행정사항

□ 2차 변경계약 및 3차분 계약 의뢰(물재생계획과 → 재무과)

□ 2차 용역 준공검사 시행 후 준공처리

붙임 : 1. 변경내역서 1부.

2. 2차 세부과업내용 1부

3. 설계변경 합의서 1부.  끝.