투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	「2018 지방 폐교 활용 가족자연체험시설 조성공사」 설계변경 시행 및 변경계약 의뢰

1. 시설과-3183(2018.12.14.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 추진 중인『2018 지방 폐교 활용 가족자연체험시설 조성공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 하여 공사추진에 만전을 기하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2018 지방 폐교 활용 가족자연체험시설 조성 공사

나. 공사기간 : 2018. 10. 23. ~ 12. 21.

다. 도 급 비 : 248,677,000원

라. 도 급 자 : 청명종합건설(주) 대표 도상원

마. 공사비 변경내역

(단위:원)

구 분		공 사 비			비 고
		당 초	변 경	증 감
총공사비		275,215,000	303,790,340	28,575,340
도급액	공급가액	226,070,000	248,570,000
	부가가치세	22,607,000	24,857,000
	계	248,677,000	273,427,000	24,750,000
관급자재비		26,538,000	30,363,340	3,825,340

※ 예산과목

- 학교지원 및 우수인재양성, 학교교육지원, 폐교를 활용한 가족자연체험시설 조성 운영, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

붙 임 : 1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 제비율 검증확인서. 1부 끝.

	시설과장
주무관	최종성		공원조성팀장	송복식		시설과장	12/14 代송복식
협조자	시설관리팀장	김영균
시행	시설과-3193	(		)	접수		(		)
우	07062	서울 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소 시설과	/
전화	02-2181-1157	/전송	02-2181-1169	/	jongsung79@seoul.go.kr	/	부분공개(5)