문서번호	시설보수과-7150
결재일자	2018.12.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
이생기		윤승범	12/14 이성재
협조
	주무관		이석근

『2018년 건설폐기물 처리용역』

설계변경 및 준공 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12

중랑물재생센터

(시설보수과)

『2018년 건설폐기물 처리용역』

설계변경 및 준공 보고

우리센터에서 추진 중인 『2018년 건설폐기물 처리용역』이 완료되었기에 아래와 같이 설계변경을 시행 및 준공 하고자 합니다.

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 2018년 건설폐기물 처리용역(연간단가)

○ 용역기간 : 2018. 4. 26 ~ 2018. 12. 31

○ 도 급 액 : 금90,250,000원

○ 도 급 자 : 서울NET(주) 대표 안성효

○ 용역개요 : 폐아스콘 70.50톤, 폐콘크리트 1,173톤,

혼합폐기물 115.50톤폐합성수지 24.75톤

□ 설계변경 사유

○ 건설폐기물 종류별 수량 증감

□ 설계변경 내용

○ 용역금액

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비고
총용역비		90,250,000	49,790,000	감) 40,460,000
도급비	공급가액	82,045,455	45,263,636	감) 36,781,819
	부가가치세	8,204,545	4,526,364	감) 3,678,181
	계	90,250,000	49,790,000	감) 40,460,000

○ 설계변경 주요 내용

공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당초	변경	증감
폐아스콘 처리	아스콘	Ton	70.50	-	감) 70.50
폐콘크리트 처리	콘크리트	Ton	1,173	110.12	감) 1.062.88
혼합폐기물 처리	혼 폐	Ton	115.50	185.97	증) 70.47
폐합성수지 처리	소 각	Ton	24.75	123.32	증) 98.57

□ 조치계획

○ 상기 내용에 대하여 설계변경하고 정산코자 합니다.

붙  임 : 변경내역서 1부.  끝.