문서번호	동북권사업단-11092
결재일자	2018.12.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	지역협력팀장	동북권사업반장		동북권사업반장
류현석	소영수	곽석권		대결 12/14 곽석권
협 조

「마들로11길, 상계로변 가로환경개선 기본 및 실시설계」

용역 계약내용 변경검토 보고

2018. 12.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

「마들로11길, 상계로변 가로환경개선 기본 및 실시설계」

용역 계약내용 변경검토 보고

「마들로11길, 상계로변 가로환경개선 기본 및 실시설계 용역」에 대한 계약내역서상 설계자문비 정산으로 변경계약(계약금액) 추진코자 함

□ 용역 개요

○ 용역위치 : 도봉구 마들로11길(창동), 노원구 상계로(상계동)

○ 용역기간 : ’17. 6. 14. ~ ’18. 12. 14.

○ 계약금액 : 115,918천원

○ 용역업체 : ㈜태조엔지니어링 대표 한명식

○ 과업내용

- 현황 및 관련계획 조사/ 교통량, 지장물 등 조사

- 교통영향 분석 및 교통처리 방안

- 노선 및 주요구조물 상세계획/ 주요구조물 상세설계 등

□ (주요) 추진 경위

○’17. 6. 14. : 용역계약(※ ‘17. 7.21. : 착수보고회 개최)

○ ’17.12.12. : 중간보고회 개최

○ ’18 2. 28. : 제1차 전문가 자문회의 개최

※ 3명 참석: 건축, 문화예술 및 교통분야

○ ’18 4. 4.  : 준공기한 연기보고(‘18.4.9.→‘18.6.30.)

○ ’18. 4.~5. : 주민설명회(3회 개최; ’18. 4.17., 4.25., 5.4.)

※ 고가하부 문화예술공간 조성사업(18년 준공)연계, 창동역 환승주차장 앞 구간이행

○ ’18. 6. 28. : 준공기한 연기보고(‘18.6.30.→‘18.10.31.)

- 연계사업인 고가하부 문화예술공간 조성사업에 대한 의견수렴 및 각종심의 등

○ ’18. 6. 14.  : 디자인심의(조건부 동의)

※ 고가하부 문화예술공간 조성사업(18년 준공)연계, 창동역 환승주차장 앞 구간이행

○ ’18. 7. 2.   : 교통규제심의(원안가결)

※ 고가하부 문화예술공간 조성사업(18년 준공)연계, 창동역 환승주차장 앞 구간이행

○ ’18. 9.         : 전문가 자문회의 개최(2차 ’18.9.10., 3차 ’18. 9.21.)

※ 2차(8명) 참석:: 도시계획, 건축, 교통, 도로, 토목시공 및 조경분야

※ 3차(5명) 참석: 도시계획, 조경, 교통 및 도로분야

○ ’18. 10. 8.  : 마들로11길, 상계로 현장방문

※ 참석자: 서울시(반장, 지역협력팀장, 담당자), 용역사(태조엔지니어링), 전문가(건축)

○ ’18. 10.~11 : 하나로클럽 앞 주민의견수렴(설명회 2회, 방문설문조사)

○ ’18. 10. 26. : 변경계약 체결

- 준공기한 연기, 계약 규모 및 금액 조정

○ ’18. 11.12. : 제2차 중간보고회 개최

※ 참석자: 서울시(반장, 지역협력팀장, 발전기획팀장 및 담당자/기반조성팀장 및 담당자), 설계사(태조)

○ ’18. 12. 4.  : 하나로클럽 앞 버스정류장 계획변경 검토 보고

○ ’18. 11.29. : 하나로클럽 앞 교통규제 심의(서울지방경찰청)

○ ’18. 12.13. : 하나로클럽 앞 도시디자인 심의(디자인정책과)

□ 변경 검토

*********************************************************

□ 변경 내용

○ 계약 내역서

(단위: 원)

공종명	단위	당초		변경		증(감)	비 고
		수량	금액	수량	금액
1. 설계비	식	1	76,788,728	1	76,788,728	-
2. 교통조사비	〃	〃	6,031,000	〃	6,031,000	-
3. 측량비	〃	〃	13,720,000	〃	13,720,000	-
4. 조감도 제작	〃	〃	5,383,000	〃	5,383,000	-
순용역비	〃	〃	101,922,728	〃	101,922,728	-
5. 손해배상공제료	〃	〃	730,000	〃	730,000	-
소 계	〃	〃	102,652,728	〃	102,652,728	-
6. 부가가치세	〃	〃	10,265,272	〃	10,265,272	-
7. 설계자문비	인	30	3,000,000		*********	********
총용역비			115,918,000		***********	********

○ 계약금액 내역

구 분	예산과목	당 초	변 경	증·감
시 비	도시경제기반형활성화계획추진, 도시재생계획수립(도시개발), 마들로11길, 상계로변가로환경개선, 시설비 및 부대비(401-01)	금 115,918,000원	*************	**********

□ 향후 일정

○ ‘18. 12. 14. :  계약변경 요청(동북권사업반→ 재무과)

용역 준공

붙임  1. 계약내역서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.