문서번호	교량안전과-22049
결재일자	2018.12.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
서성만		이홍재	12/17 김종호
협조

- 2018년 금천교 보수공사 -

설계변경 자문회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

교량안전과

- 2018년 금천교 보수공사 -

설계변경 자문회의 결과 보고

2018년 금천교 보수공사 설계변경 자문회의 결과 보고 임

Ⅰ		근 거

□『2018년 금천교 보수공사』설계변경 자문회의 개최 계획 보고

(교량안전과-21806, ‘18.12.12)

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 2018년 금천교 보수공사

□ 공사기간 : 2018. 5. 10. ~ 2019. 1. 4

□ 사 업 비 : ***********(배정액)

□ 공 사 비 :   *********

○ ******************************************

□ 공사내용

○ 교면포장 55.3a, 교면방수 37.84a, 차량방호책 철치 347m

○ 콘크리트 표면보수 795㎡, 보도포장 565㎡ 등

□ 계약상대자 : ㈜광림이엔지

Ⅲ		설계변경 자문회의 결과

□ 자문회의 개요

○ 일 시 : 2018.12.31.(목) 14:00

○ 장 소 : 교량안전과 회의실

○ 위원구성

- 위원장 : ***********************

- 위  원

· 내부(3) : ***********************형

· 외부(1) : ************************

- 간 사 : ***********

□ 자문결과 : 조건부 가결

□ 주요 자문내용

○ 재경비 정산 : 적정

○ 신규비목 단가산출 : 적정

***********************************************

******************************************************************************************

********************************************************************************

○ 자문결과 공사비 변경 내역

구 분	********	*********	***	비 고
총공사비	***********	***********	**********
도 급 비	***********	***********	**********
관 급 비	***********	***********	*
이 전 비 (폐기물처리 등)	**********	**********	*

Ⅳ		조 치 방 안

□ 자문회의 결과 통보(사공사, 감리) 및 설계변경 추진

Ⅴ		향 후 계 획

□ ‘18. 12. 19  : 설계변경 및 변경계약

□ ‘18. 12. 31  : 공사 준공

붙임  1. 설계변경 자문회의 결과 1부.

2. 설계변경 제비율 검증 확인 1부.

3. 설계변경 자문회의 계약금액 조정 관리대장 1부.

4. 설계변경 자문회의 결과 반영 내역서 1부.  끝.