문서번호	시설과-11766
결재일자	2018.12.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설과장	시설안전부장
문정주		송병욱	전결 12/17 이규상
협조

「수유6배수지 건설공사」

기존배수지 보수 관련 실정보고 검토

2018. 12.

상수도사업본부

(시설안전부)

「수유6배수지 건설공사」

기존배수지 보수 관련 실정보고 검토

수유6배수지 건설공사와 병행하여 시행예정인 기존 배수지 구조물 외벽에 대한 보수작업 관련 실정보고를 검토하여 보고 드림.

사업개요

❍ 규    모 : 배수지 확충 3,100㎥(기존 3,000 ㎥ ⇒ 6,100㎥)

송배수관부설 500~600㎜, 연장 990m

❍ 기    간 : ’17. 12. 13.~’20. 5. 30.

❍ 도 급 비 : 2,667백만 원

❍ 시 공 사 : 영동건설㈜ 외 1개사

❍ CM 사 : ㈜한국종합기술 외 1개사

보고내용(건설사업관리자)

❍ 관련공문 : 낙산및수유6배수(감리) 제18-416호(’18. 12. 14.)

- 기존 수유6배수지 보수 계획에 따라 보수물량 및 소요 비용 산출
[시설과-11404(’18. 12. 6.)호 관련]

❍ 주요 시공 수량

구 분	단위	수량
단면복구	㎡	22
균열보수공법	m	28
시공이음 면정리	㎡	231
아스팔트에멀젼 방수	㎡	231
방수층 보호재 설치	㎡	231

❍ 공사비 증·감 현황(증 36,410천원)

(단위:원)

공종명	규 격	단위	당 초		변경		증·감 (변경-당초)
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
합계						36,410,000		36,410,000
직접공사비						22,731,156		22,731,156
강관비계	3개월,10m이하	㎡			231	2,684,913	231	2,684,913
단면복구	T=30mm	㎡			22	3,776,388	22	3,776,388
균열보수공법	습식,B=0.3~0.5mm, T=150~300mm	m			28	2,003,064	28	2,003,064
시공이음면 정리		㎡			231	6,289,668	231	6,289,668
아스팔트 에멀젼 방수		㎡			231	6,395,697	231	6,395,697
방수층 보호재 설치	T=20mm	㎡			231	1,581,426	231	1,581,426
제잡비						13,678,844		13,678,844

※ 단가는 협의율((86.776%+100%)/2=93.388%) 적용

❍ 북부수도사업소에서 시행한 정밀점검용역 결과을 반영하여 보수작업을 시행하고 추후 설계변경시 반영함이 타당

검토의견(공사관리관)

❍ 그밖에 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우로서 공사계약 일반조건 제6절의 공사 설계 변경 사항에 해당

- 수유6배수지 건설공사의 원활한 후속공정 진행을 위해 금회 기존 배수지 보수작업을 시행

❍ 건설사업관리자 실정보고를 승인하고 설계변경 등 후속 절차 이행

- 계약금액조정 심사 의뢰(→ 본부 재무회계과)

붙임 : 건설사업관리자 실정보고 공문 1부.  끝.