문서번호	시설과-3205
결재일자	2018.12.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장
여은솔	김영균	12/17 진병규
협 조

「보라매공원 테마 물놀이터 조성공사」

설계변경 검토 보고

2018. 12.

동부공원녹지사업소

(시  설  과)

「보라매공원 테마 물놀이터 조성공사」

설계변경 검토 보고

「보라매공원 테마 물놀이터 조성공사」와 관련하여 설계변경 사항이 발생하여 아래와 같이 검토 보고 드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 보라매공원 테마 물놀이터 조성공사

○ 공사기간 : 2018. 9. 10. ~ 2018. 12. 22.

○ 도 급 액 : 금260,933,900원(금이억육천구십삼만삼천구백원)

○ 도 급 자 : ***************

○ 공사내용 : 물놀이형 수경시설 및 기계설비 설치 등

□ 설계변경 검토

○ 설계변경 내용

구 분	설 계 변 경 내 용	비 고
****	******************************************* ************************************* ******************************** ******************************* ******************************** ********************************** ********************************** ******************************** ******************* **********************************	******* ********* ************ * ******* ********* ************ * ***** ****** ********* ************* * ***** ****** ********* ************
*****	*************************************** ********************** ************************** ******************************* ************************************************
****	**************************************************** ********************************************** ****************************************** ****************************** ******************************************** ********************************************* *****************************************
****	********************************** ************************************** ************************************** *************************************** ************************************** **************************************
**** *******	*********************************** ******************************

□ 예산 검토

○ 공사비 변경내역

구 분		금 액(원)		증 / 감 (원)		비 고
		당 초	변 경
도급비	계	260,933,900	287,000,000	증	26,066,100
	공급가액	237,212,637	260,909,091	증	23,696,454
	부가세	23,721,263	26,090,909	증	2,369,646

○ 예산내역

구 분	예산 (a)	집행금액 (원)				비 고
		도급 (b)	관급자재 (c)	폐기물용역 (d)	잔액 (e=a-b-c-d)
물놀이터 조성공사	370,000,000	260,933,900	67,918,600	10,925,200	30,222,300

- 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화지원, 공원관리 및 도시녹화지원, 보라매공원 시설물 정비, 시설비(401-01)

□ 검토의견

○ 상기 변경내용에 대하여 설계변경 시행 및 변경계약 의뢰하고자 함.

○ 예산조치사항

- 도급비 증액분은 공사 낙찰차액을 활용하여 집행

붙   임 : 1. 변경설계서 제출 공문(서울시설공단) 1부.

2. 변경설계내용(서울시설공단) 1부.

3. 변경설계서(서울시설공단) 1부.

4. 제비율검증 확인서 1부.  끝.