문서번호	도시철도설비부-11854
결재일자	2018.12.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
박명기		이명수	12/17 구자훈
협조

지하철9호선3단계 920공구건설공사(기계)

설계변경검토보고

2018. 12.

도시기반시설본부

도시철도설비부

지하철9호선3단계 920공구 건설공사(기계)

설 계 변 경 검 토 보 고

지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사 기계설비분야 설계변경 자문(소)위원회 결과 보고 및 설계변경 사항에 대하여 보고함.

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사

❍ 공사규모 : 연장1,390.5m[본선 1,053.4m, 본선환기구 149.6m]

❍ 공사기간 : ’09.12.31  ~ ’18. 12. 31

❍ 시 공 사 : 롯데건설(주), 두산건설(주)

❍ 감 리 사 : 벽산ENG(주)외 3개사 (기계:한일엠이씨)

❍ 계약금액 : 총 156,190백만원 (기계 14,070백만원)

********************************

*********자문의결사항조치결과

설계변경 자문회의 의결사항	설계변경 자문회의 의결결과	의결조치결과
① 공조 및 제연시스템 개선	설계변경 적용(조건부 가결)	반영함
② 승강장 축소에 따른 스크린도어 변경	설계변경 적용(조건부 가결)	반영함
③ 기계식 자전거주창장 삭제	설계변경 적용(조건부 가결)	반영함
④ PSD 레이저센서 신설	설계변경 적용(조건부 가결)	반영함
⑤ 본선터널내 소화배관 방식 변경	설계변경 적용(조건부 가결)	반영함
⑥ 공기여과시설 개선계획에 의한변경	설계변경 적용(조건부 가결)	반영함

***************

* *********총 공사비 증감내역

구 분	설 계 변 경 금 액 (원)			비 고
	당 초	변 경	증 감
총 공 사 비	**************	**************	**************
간접공사비	*************	*************	************
직접공사비	**************	*************	**************

※총공사비는 E/S 4차분까지의 금액 기준으로 향후 E/S결과에 따라 금액변경 될수있음

* *********세부 증·감 내용

1) 계약금액 조정(직접비)

NO	구 분	당 초	변 경	증 감	비고
1	승강장 축소에 따른 스크린도어변경	*************	*************	************
2	기계식 자전거 주차장 삭제	***********	*	************
3	PSD 레이저센서 신설	*	**********	**********
4	본선터널내 소화배관 방식 변경	***********	***********	***********
5	공기여과시설 개선계획에 의한변경	***********	***********	************
합 계(계약금액 조정)				**************

2) 계약금액내 조정(직접비)

NO	구 분	당 초	변 경	증 감	비고
1	공조 및 제연시스템 개선	***********	***********	**********
합 계 (계약금액내 조정)				**********

※ 계약금액내 조정 : 지하철9호선3단계 일괄공사계약특수조건 제19조(설계변경등)①항에 의거 증감

금액을 합산하여 계약금액을 조정하되 계약금액을 증액할수없음.

**************

*********기계분야 설계변경내용을 관련부서인 도시철도토목부에 통보

붙 임 : 1. 설계변경 자문의결사항 조치결과 보고(감리단)

2. 설계변경 자문의결사항 조치결과 제출건 1부(시공사)

3. 설계변경심의결과 조치사항 1부

4. 설계변경내역서 총괄 1부. 끝.