문서번호	시설과-11817
결재일자	2018.12.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
윤걸		代최이영	12/17 이규상
협조

「낙산배수지 건설공사」

방수층 보호재 반영에 대한 실정보고

2018. 12.

상수도사업본부

(시설과)

「낙산배수지 건설공사」

방수층 보호재 반영에 대한 실정보고

「낙산배수지 건설공사」공사중 설계에 철근운반비 및 슬래브 간격 유지 철근이 누락되어 반영에 관한 사항을 보고 드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 낙산배수지 건설공사

○ 공사개요 : 배수지 증설 2,300㎥(기존 3,300㎥)

○ 공사기간 : 2017. 12. 13.~2020. 5. 30.

○ 도 급 비 : 1,977백만원(2차수 : 889백만원)

○ 시 공 사 : ㈜엔씨종합건설 대표 임진규 외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜한국종합기술 대표 이인제 외 1개사

□ 보고내용(건설사업관리자)

○ 관련공문 : 낙산및수유6배수(감리) 제18-423호(’18. 12. 17.)

- 구조물 외부 방수층 보호재 반영 실정보고

○ 배수지 구조물 벽체 외부 방수공사 후, 되메우기 시행예정으로 토사반입 전후 방수층 파손 방지를 위해 보호재 추가 시공 필요

- 구조물 벽체 외부 방수공법 : 고무 아스팔트 방수

고무아스팔트 방수층 보호재 설치 (토사 되메우기 구간)	상부슬래브 외부방수 고무아스팔트복합 방수층 보호

○ 배수지 구조물 상부슬래브 외부 방수공사 후, 방수층 보호재가 누락되어 있어 보호콘크리트 타설 필요.

- 구조물 상부슬래브 외부 방수공법 : 고무아스팔트 복합방수

○ 주요 변경 내용

공 종	명 칭	단위	당 초	변경	증·감 (변경 대비)	비고
방수층 보호재	T=20mm	㎡	-	333	증 333
콘크리트 타설	25-21-150	㎥	-	74	증 74
기계휘니셔마감		㎡	-	978	증 978
줄눈절단 및 설치	8mm 우레탄실런트	m	-	359	증 359

○ 공사비 증·감 현황(도급비 20,818,600원 증)

(단위:원)

공종명	규 격	단위	당 초		변경		증·감 (변경-당초)
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
합계						20,818,600		20,818,600
직접공사비						11,698,264		11,698,264
방수층 보호재	T=20mm	㎡			333	2,403,927	333	2,403,927
와이어메쉬 설치	#8,150×150	㎡			493	1,485,409	493	1,485,409
콘크리트 타설	25-21-150	㎥			74	987,530	74	987,530
콘크리트 양생		㎥			74	196,174	74	196,174
기계휘니셔마감		㎡			978	3,396,594	978	3,396,594
줄눈 절단	8mm	m			359	1,246,807	359	1,246,807
줄눈 설치	우레탄실런트	m			359	997,302	359	997,302
쇠흙손마감					493	984,521	493	984,521
제잡비						9,120,336		9,120,336
관급자재비						5,035,620		5,035,620
레미콘	25-21-120				76	5,009,920	76	5,009,920
수수료						25,700		25,700

※ 신규 단가 낙찰율(86.84%)적용

□ 검토의견(공사관리관)

○ 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 공사계약 일반조건 제6절의 공사 설계 변경 사항에 해당

- 배수지 구조물 보호를 위해 설계에 누락된 벽체 외부 방수층 보호재 및 상부슬래브 방수층 보호콘트리트 공종을 금회 반영

○ 건설사업관리자 실정보고를 승인하고 설계변경 등 후속 절차 이행

붙임 : 건설사업관리자 실정보고 공문 1부.  끝.